문서번호	토목부-16471
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		터널건설과장	토목부장
이현국		박일연	09/19 김영수
협조

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

‘18년도 추경예산 집행 계획 보고

2018. 9.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

‘18년도 추경예산 집행 계획 보고

‘18년도 추경예산(38억 원)이 편성됨에 따라 현장여건을 반영하여 예산 사고이월 방지를 위한 예산집행계획 검토보고임.

Ⅰ		사 업 개 요

○ 사 업 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 공사위치 : 송파구 풍납동 일대

○ 사업규모

- 램프신설 : L=1,383m (교량 446m 포함)

- 램프이설 : L=1,309m (교량 139m 포함)

- 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21km), 김포방향(L=1.16km)

○ 사업기간 : 전체‘16. 4. 1. ~ ‘20. 3. 5. (3차 : ‘18. 1. 19. ~ ‘18. 12. 31.)

○ 총사업비 : 전체 473억 원 [‘18년 : 91억 원(추경38억 원 포함)]

○ 감 리 사 : ㈜이산외 2개사

○ 시 공 사 : ㈜덕일외 2개사

○ 공 정 율 : 37%

Ⅱ		추 진 경 위

○ ‘16.04.01. : 공사 계약 및 착공

○ ‘18.01.19. : 공사(3차) 착공

○ ‘18.04.17. : ‘18년 사업예산 긴급 추가(추경) 확보 요청(토목부-6621)

○ ‘18.07.31. : 추경예산안 심의·확정

○ ‘18.09.14. : 시의회 추경안 심의·의결

Ⅲ		예 산 현 황

○ ‘18년도 예산현황

(단위 : 백만 원)

구 분	본예산	추경예산	예산현액	비고
합 계	5,350	3,800	9,150
시 설 비	4,700	3,716	8,416
감 리 비	650	84	734

- ‘18년도 추경예산 중 감리비로 84백만 원 배정되었으나 건설사업관리기술자 투입인원 조정 등에 따라 필요한 예산이 15백만 원으로 목변경(감리비→시설비)이 필요한 실정임.

Ⅳ		검 토 내 용

□ 시설비 집행 계획 (3,785백만 원)

○ 공사 추진계획

(단위 : 백만 원)

*****	*******	***	**
*****		*****
*************	******************* ****************** ******************	*****
*************	************************ ************************ ***********************	***
*********	******************* ******************** *******************	**

***********

****

□ 감리비 집행 계획 (15백만 원)

*******************************

****************************************************

******************************************************

*********************

****

**********************************

****************************

Ⅴ		조 치 계 획

○ 상기와 같이 원활한 공정관리를 위하여 ‘18년도 추경예산을 효율적으로 사용하고자 하며,

○ 건설사업관리기술자 투입인원 조정 등에 따른 미 집행 감리비를 통계목 변경(감리비→시설비)하여 집행하고자 함.

「통계목변경 현황」

(단위 : 백만 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
합 계	9,150	9,150	-	(추경) 3,800
시 설 비	8,416	8,485	69	(추경) 3,785
감 리 비	734	665	감 69	(추경) 15

Ⅵ		행 정 사 항

○ 통계목변경(감리비→시설비) 및 예산 재배정 요청 (도로계획과)

붙 임  2018년 예산서 1부.  끝.