문서번호	급수운영과-23486
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
최덕환	권기섭	송근호		09/19 이구석
협 조

「 군********리간 ******비공사 」

공사  준공 기한  연기 검토  보고

2018. 9.

동부수도사업소

(급수운영과)

「 군자**********배수관 정비공사 」

공사 준공 기한 연기 검토 보고

	우리 사업소가 시행하고 있는 ********************** 의일부 사업 구간이 2018년 하반기 도로굴착 심의 대상으로 굴착 승인 지연 등 절대 공기가 부족하여 아래와 같이 준공기한을 연기하고자 보고 드림.

공사 현황

○ 공 사 명: 군자역 ~************정비공사

○ 공사기간: 2018. 5. ***********9. 30.

○ 도급금액: 486****천원

○ 공사개요: D = 80************0m

○ 도 급 자: 대동건설,********

○ 추진현황: 신설관 정비 D = 80~500mm, L=610m 계획 → 567m완료(93%)

기존관 충진 D = 700mm,    L= 1,260m(준비중)

보고 내용

○ 사업 일부구간이 2018년 하반기 도로굴착 심의대상으로 굴착 승인 지연******

○ 2018년 여름철 예상하지 못한 극심한 폭염 일수(*****)가 지속 되는 등 작업자 안전을 위한 공사 중단 조치 반복.

구 분	계	굴착 승인 지연 (하반기 도로 심의 대상)	폭염 일수	비 고
공사 기간 중	60	45	15

▷ 공사 기간 연기 일수                                      ( 단위: 일 )

※ 2018년 하반기 도로굴착 심의 대상(3구간) 굴착 승인 완료----2018. 8. 30.

- 3구간(D=60m)은 본부 도면 심사시 추가 검토 반영된 사업으로 2018년 상반기 굴착 협의가 안된 구간임.

○ 위 보고 내용과 같이 굴착 승인 지연 등  공사 할 수 있는 절대 공기 부족 예상

조치 의견

○ 상기와 같이 절대 공기가 부족한  『 군자역~화양 삼거리 송배수관 정비공사 』 의 준공 기한을 아래와 같이 연기하여 공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

▷ 준공 기한 연기 : 60일 연기

- 당초: 2018. 5. 4. ~ 2018.  9. 30.

- 변경: 2018. 5. 4. ~ 2018. 11. 29.

▷ 준공 기한 연기 귀책 사유: 동부수도사업소

▷ 지체 상금 부과 여부: 미부과

첨부  준공 기한 연기 사유서 1부.  끝.