문서번호	설비부-13110
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
곽용길		여인웅	09/19 권오식
협 조
	주무관			이호기

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 건설사업관리용역』

건설사업관리 용역기술자(기계,전기,통신) 배치 기간 연장 요청에 대한 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.09.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 건설사업관리용역』

건설사업관리기술자(기계,전기.통신) 기간연장 요청에 대한 검토 보고

『세종대로 일대 역사문화특화공간 조성 건설사업관리용역』의 건설사업관리용역 수행중 설비(기계,전기,통신) 공사의 공사기간 연장에 따라 건설사업관리기술자(기계, 전기, 통신) 배치 연장 요청에 대한 검토 보고임.

■ 용역 개요

○ 용 역 명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

○ 용역기간 : ‘16.10.18.~‘18.10.05.

○ 용역금액 : ***********

○ 용역업체 : ㈜정림건축외 1개사

■ 관련근거

○ 정림 역사문화18-705(2018.09.19.) 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 공사 감리배치기간 연장 요청

■ 건설사업관리기술자 배치 기간 연장 요청 사유

○ 건축공사 공기연장에 따라 후속공정인 설비(기계,전기,통신)공사의 공사기간 연장으로 건설사업 기술자(기계,전기,통신,소방) 기간 연장 필요.

■ 변경 내용

○ 배치 기간 연장 현황

<상주 기술자>

분야	변경 전	변경 후	비고
기계	‘17.01.24 ~‘18.10.15	‘17.01.24 ~‘18.12.20	증 59일
전기	‘17.02.17 ~‘18.10.15	‘17.02.17 ~‘18.12.20	증 59일

<비상주 기술자

분 야	변경 전	변경 후	비고
기계,통신,소방	‘16.10.19 ~‘18.9.18	‘16.10.19 ~‘19.01.04	증108일

○ 금액 변경현황(직접비 기준)

(단위:원)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
총 계	***********	***********	************
기계분야	**********	**********	************
전기분야	**********	**********	***********
비 상 주	**********	**********	***********

■ 검토의견

○ 건축공사 공기연장으로 후속공정인 설비(기계,전기,통신)공사 기간을 2018.12.20.일로 연장하여 건설사업관리용역의 설비(기계,전기,통신,소방)용역 기간을 연장함이 타당하다고 판단됨.

○ 상주 기술자(기계,전기)는 임시개관일 제외하고 2018.12.20.까지 59일을 연장하고, 비상주 기술자는 2019.01.04.까지 108일을 연장하고자 함.

■ 조치의견

○ 상기와 같이 검토한 결과 감리 배치 기간 연장 및 금액 변경이 적정한 것으로 판단되어 승인하고자 하며

○ 건설기술자(기계,전기,통신,소방)배치 기간 연장요청 하고자 함.

따로붙임 : 관련공문 사본 1부.  끝.