문서번호	도로시설과-10203
결재일자	2018.9.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
실무사무관	기전시설팀장	도로시설과장
정광식	김호성	09/19 김진효

『도로터널 방재시설 개선사업 타당성 조사 용역』

준공기한 연장 검토보고

2018. 9.

안전총괄본부

(도로시설과)

『도로터널 방재시설 개선사업 타당성 조사 용역』

준공기한 연장 검토보고

『도로터널 방재시설 개선 타당성 조사용역』건과 관련하여 투자심사 본위원회 심의가 도래되지 않아 준공기한을 연기하여 심의 결과 반영 등 조치코자 함.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 도로터널 방재시설 개선 타당성 조사용역

○ 용역기간 : 2018. 5. 30. ~ 9. 26.(120일)

○ 계약금액 : ********

○ 용 역 사 :*********

○ 과업내용

- *******************************

- **********************

- *****************************

- *******************

□ 추진 경위

○ `18. 4. 18 : 용역 시행 계획 방침

○ `18. 5. 30 : 용역 계약 및 착수

○ `18. 6. 18~6.22 : 현장조사

- 대    상 : 북악 외 11개 터널

- 조사내용 : 제연설비 등 방재시설 설치 예상 위치

○ `18. 6.23~8.31 : 타당성 조사 및 경제성 분석

- 공사비, 성능평가 비용 및 유지관리비 산출, 경제성 분석 등

○ `18. 9. 14 : 투자심사 소위원회 개최

□ 준공기한 연장 검토

○ 연장사유

- 본 건은 도로터널 방재시설 개선 사업의 투자심사를 위한 타당성 조사 용역으로써

- 현재까지 2018년 4차 투자심사 본위원회(9.20일) 심의가 남아 있어 심의 결과에 따른 용역 보완을 위해 계약기간을 연장하고자 함.

○ 연장내역

변경내역	당 초	변 경	비 고
****	***************	****************	******
****	***********	***********	****

○ 귀책소재 : 서울특별시

○ 지체상금 : 미부과

□ 향후 추진 계획

○ ‘18. 10.~11. : 투자심사 심의 의견 반영

○ ‘18. 11. 26. : 용역 준공.  끝.