문서번호	기전설비과-7362
결재일자	2018.9.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전설비과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
곽대근	조성태	유성종		09/20 구아미
협 조
	기획예산과장		김형규
	재무회계과장		代서미희
	시설과장		송병욱

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

국사봉 배수지 건설공사

기계분야 관급자재 구매 계획

2018. 9.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	국사봉 배수지 건설공사 기본및실시설계용역
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

국사봉 배수지 건설공사

기계분야 관급자재 구매 계획

우리 본부에서 시행중인「국사봉 배수지 건설공사」에 소요되는 기계분야  관급자재(밸브)의 구매 계획임.

Ⅰ		사업 개요

◯ 사 업 명 : 국사봉 배수지 건설공사(기계분야)

◯ 사업기간 : 2016. 12. 1. ~ 2019. 5. 19.

◯ 기계분야 공사비 : 128백만원

- 배관공사 :  25백만원 / 관급자재(밸브) : 103백만원

◯ 공정 추진현황 : 전체 공정율 68%

- 현재 토목공정은 배수지 슬라브 및 기계실 철근가공조립 중으로 콘크리트 타설이 10월말 완료 예정으로

- 기계공사는 11월부터 시공이 가능함으로 밸브관급자재 구매는 제작기간이 50일 정도 소요되므로 현재 발주하여 11월초에 납품 받을 계획

Ⅱ		구매개요

◯ 구매대상

품명	규격	수량(대)	용도	특정제품 심의대상
버터플라이 밸브	전동, D700, 금속, 일상	2	유입	대상
	전동, D800, 금속, 일상	2	유출
	수동, D700, 금속, 일상	2	유입
	수동, D800, 금속, 일상	4	유출

◯ 구매금액 : 103백만원

◯ 예산과목 : 자본적 지출, 비가동설비 자산취득, 건설중인 자산, 국사봉배수지 건설공사, 시설비 및 부대비, 시설비

◯ 구매방법 : 조달청 우수제품 3자단가계약 제품 구매

Ⅲ		특정제품 선정 심의위원회

◯ 심의위원회 개최 사유

- 우수조달 물품의 구매 시 유사한 성능, 규격의 물품이 다수인 경우 특정제품 선정 심의위원회 의결을 통함

- 관련 근거 : 정수시설분야 관련 업무개선 계획보고

(생산관리과-2319, ‘18. 3. 6. 부본부장방침)

◯ 검토 대상 : 버터플라이밸브(D700 ~ D800) 제품 선정

◯ 일시 및 장소 : ‘18. 9. 20.(목) 16시 ~ 18시, 생산부장실

◯ 위원회 구성

- 위원장 : 생산부장

- 위  원 : 기술진단과장, ㈜우원엠앤이 변운섭위원, 동성엠엔이 정남기위원, 도화엔지니어링 이근채위원

※ 외부위원은 건설기술심의위원으로 구성

- 간  사 : 기전설비과장

Ⅳ		행정사항

◯ 특정제품 선정 심의위원회 개최결과에 따라 관급자재 밸브 구매

◯ 외부위원 심의수당 지급

- 소요 예산 : 45만원(15만원 × 3명)

- 예산 과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비(사무관리비)

- 지출 방법 : 외부위원 계좌입금

붙임 : 1. 특정제품 선정 심의위원회 심의 요청서 1부.

2. 특정제품 선정 심의 사전 검토서 1부.

3. 유사제품 비교 검토서 1부.

4. 심의위원 검토 의견서(양식) 1부.

5. 버터플라이밸브 가격 비교표 1부.  끝.