문서번호	시설과-2366
결재일자	2018.9.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	09/20 代오철선
협 조
	공원운영과장		오철선
	시설관리팀장		김영균
	주무관		강희진
	주무관		이재홍
	주무관		신상현
	주무관		김재희
	주무관		황은애
	주무관		여은솔

2018년 하반기

소공원 시설공사 하자조사 추진계획

2018. 9

동부공원녹지사업소

(시설과)

『2018년 하반기』

소공원 시설공사 하자조사 추진계획

우리사업소 관할 소공원 중 시설과에서 공사 준공 후 시설 인계한 시설공사를 대상으로 하자조사를 추진하여 식재 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		하자조사 개요

❍ 조사대상 : 공사 38개, 관급자재 7개

(시설과에서 공사 준공 후 소공원에 시설인계한 공사)

※ 2018. 8. 31. 까지 완료한 시설공사

❍ 조사기간 : 2018. 9. 19. ~ 10. 31.

❍ 조 사 자 : 팀장, 담당자, 소공원 담당

❍ 조사내용 : 식재 및 시설물 하자 조사 등

❍ 관리방법 : 공사준공 후 시설물 인계하여 소공원에서 유지관리

❍ 공사현황

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
1	보라매공원 현장근로자 근로환경 개선공사(별동신축)	’16.3.7 ~’16.11.10	근로자 대기실 및 창고 신축	*******	’16.11.10 ~’21.11.9	5년	김영균
2	천호공원 무장애 친화공원 조성공사	’16.8.25 ~’16.11.2	식재공사,경사데크 1개소, 투수블럭 105㎡등	*****	’16.11.15 ~’18.11.14	2년	신상현
3	동부공원녹지사업소 청사 난방배관 정비공사	’16.9.9 ~’16.9.28	난방배관 교체	*****	’16.9.28 ~’18.9.27	2년	김영균
4	2016년 보라매공원 시설물 정비공사 관급자재 <금속재울타리>	‘16.09.29 ~'16.11.14	금속재울타리 34경간	*****	‘16.11.21 ~‘18.11.20	2년	황은애
5	2016년 보라매공원 시설물 정비공사	‘16.10.14 ~'16.12.12	연못전망대 교체, 와우산계단 교체	*******	‘16.12.19 ~‘18.12.18	2년	황은애
6	보라매공원 신축건물 주변 조경 공사	’16.11.7 ~’16.11.13	식재공사	*******	’16.11.16 ~’18.11.18	2년	최종성
7	보라매 반려견놀이터 CCTV추가 조달 구매	17.2.2 ~'17,2.23	2백만화소 팬틸트 2대, 2백만화소 고정돔 1대	*****	‘17,2.23 ~'19.2.22	2년	강희진
8	2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사	‘17.3.20 ~‘17.4.28	워터콘트롤밸브외 교체공사	*********	‘17.5.1 ~‘19.4.30	2년	여은솔

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
9	보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사	‘17.03.23 ~'17.05.06	장파고라 1, 평파고라 1, 테이블 9, 평의자 16, 게시판형보관함 3	*****	‘16.11.22 ~‘18.11.21	2년	황은애
10	서울숲 공원 주차장 차량인식기 구매	‘17.3.22 ~‘17.6.19	차량인식기 설치	******	‘17.6.19 ~‘20.6.17	3년	여은솔
11	길동생태공원 반딧불이 증식장	‘17.4.3 ~‘17.6.11	지상1층49.5㎡증축	*********	‘17.6.12 ~‘22.6.11	5년	김영균
12	전광판구매 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.20 ~'17.5.10	LED W2720*H1280전광판	********	‘17.5.10 ~'19.5.9	2년	강희진
13	전광판제어공사 (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.24 ~'17.5.31	천호공원관리사무소~천호공원야외무대 간 광케이블 설치 등	******	‘17.5.31 ~'19.5.30	2년	강희진
14	음향장치 구매<관급자재> (천호공원 야외무대 시설정비)	17.4.26 ~'17.5.8	오디오믹서, 무선리시버 2개, 무선헤드셑 1세트, 무선마이크 1개, 2CD 데크 1	********	‘17.5.12 ~'19.5.11	2년	강희진
15	걷고 누리고 싶은 와우산 만들기 주민참여 사업	‘17.5.24 ~‘17.7.14	와우산 정비공사	*******	‘17.7.21 ~‘19.7.20	2년	최종성
16	보라매공원 배드민턴장 시설개선 사업	‘17.5.24 ~‘17.7.14	노후 배드민턴장 시설개선	*********	‘17.11.16 ~‘19.11.15	2년	최종성
17	천호공원 남 여 화장실 정비공사	‘17.10.23 ~‘17.11.6	화장실 정비공사 (타일, 환풍기 등)	*****	‘17.11.07 ~‘19.11.06	1년	김영균
18	보라매독서실 옥상방수 공사	‘17.08.24 ~‘17.09.04	바탕처리(730㎡) 폴리우레아(T3mm)	******	‘17.09.05 ~‘20.09.04	3년	김영균
19	길동생태공원 근로자 샤워실 설치공사	‘17.07.17 ~‘17.08.14	지하 1층(11.1㎡)	*****	‘17.08.15 ~‘20.08.14	3년	김영균
20	보라매 배드민턴장 조명개량전기공사	‘17.10.20 ~‘17.11.20	등주:3주, 투광등28등,제어반	*********	‘17.11.20 ~‘18.11.19	1년	강희진
21	서울숲cctv시설개선공사	‘17.11.28 ~‘17.12.15	cctv 13대	**** ***	‘17.12.15 ~‘19.12.14	2년	강희진
22	시민의숲 목재데크 정비공사	‘17.11.22 ~‘17.12.11	목재휀스, 데크 보수 등	*********	‘17.12.14 ~‘19.12.13	2년	김재희
23	율현공원 시설물 개선공사	‘17.12.11 ~‘17.12.22	율현공원 야적장, 쇄석깔기 등	********	‘17.12.27 ~‘19.12.26	2년	김재희
24	보라매 공원 중앙화장실 상수도 배관 조성공사	‘17.11.13 ~‘17.11.27	상수도배관, 밸프 교체 등	***	17.11.27 ~‘19.11.26	2년	여은솔
25	보라매공원 휴게시설 신설 및 교체공사	‘17.03.23 ~‘17.05.06	파고라, 테이블, 평의자, 보관함 등	*******	17.05.18 ~‘19.05.17	2년	황은애
26	보라매공원 변전실 뒤 환경친화형 차폐시설 설치공사	‘17.09.19 ~‘17.10.13	분리수거함 1개소, 사철나무70주, 화살나무20주	******	‘17.10.19 ~‘19.10.18	2년	황은애
27	보라매공원 에어파크 항공기 정비공사	‘17.10.10 ~‘17.11.03	항공기(f-86f,t-37c) 도색	******	‘17.11.14 ~‘18.11.13	1년	황은애
28	보라매공원 어린이놀이터 정비공사	‘17.11.22 ~‘17.12.16	포장, 휴게시설 설치, 식재 등	*******	‘17.12.28 ~‘19.12.27	2년	황은애
29	보라매공원 다목적운동장 휴게시설 설치공사	‘17.11.29 ~‘17.12.18	파고라지붕, 포장 평파고라, 등의장 등	********	‘17.12.28 ~‘19.12.27	2년	황은애
30	보라매공원 노후 탄성포장 재정비 사업(포장)시행	‘17.10.16 ~‘17.11.08	철거, 아스코포장, 탄성포장(관급)등	*******	‘17.11.09 ~‘19.11.08	2년	신상현
31	보라매공원 계류시설 순환배관	‘17.4.28 ~‘17.5.10	배관 교체	****	‘17.5.11 ~‘19.5.10	2년	신상현

연번	공사명	공사기간	공사내용	시공사	하자책임 담보기간	비고	담당
32	보라매공원 정문주차장 무인요금 시스템 구매 설치<관급자재>	‘17.08.16 ~‘17.09.20	무인정산기, 캐노피 등	******	‘17.09.21 ~‘19.09.20	2년	여은솔
33	서울숲 공원 주차관제 시스템 정비공사<관급자재>	‘17.10.19 ~‘17.12.19	출구 차량인식기	******	‘17.12.19 ~‘20.12.18	3년	여은솔
34	응봉서울숲공원 스마트공원조명 제어장치 구매설치<관급자재>	‘17.11.1 ~‘17.12.21	응봉공원 40개소 서울숲 52개소	******	‘17.12.21 ~‘18.12.20	1년	강희진
35	응봉테니스장cctv구매설치<관급자재>	17.08.16 ~‘17.09.14	cctv 설치	**********	‘17.09.15 ~‘19.09.14	2년	강희진
36	응봉cctv개량 물품구매<관급자재>	‘17.07.05 ~‘17.09.14	cctv 설치 등	******	‘17.09.15 ~‘19.09.14	2년	강희진
37	양재 시민의 숲 수경시설 정비공사	‘18.04.02 ~‘18.04.16	펌프2대, 인버터 1대 교체 등	*********	‘18.04.17 ~‘20.04.16	2년	여은솔
38	2018년 수경시설물(보라매&천호공원) 정비공사	‘18.03.20 ~‘18.06.08	수중펌프,인버터 등	******	‘18.06.05 ~‘20.06.04	2년	여은솔
39	서울 숲 공원 주차장 요금정산기 정비공사	‘18.06.05 ~‘18.07.02	무인정산기 스마트카드 교체	******	‘18.07.02 ~‘19.07.01	2년	여은솔
40	서울숲 게이트볼 코트 정비	‘18.05.25 ~‘18.06.18	게이크볼 코트 1면, 퍼걸러 1조	**********	‘18.06.16 ~‘20.06.15	2년	신상현
41	길동생태공원 노후 울타리 정비	‘18.06.14 ~‘18.07.08	대나무 울타리 교체	******	‘18.07.09 ~‘20.07.08	2년	신상현
42	보라매공원 다목적운동장 노후 운동시설 개선공사	‘18.02.20 ~‘18.04.05	운동시설 개선	********)	‘18.04.05 ~‘20.04.04	2년	황은애
43	보라매공원 에어파크 항공기 정비공사	‘18.03.26 ~‘18.04.24	항공기(f-5b,o-2a) 도색	******	‘18.04.24 ~‘19.04.23	1년	황은애
44	보라매공원 유아숲체험장 조성공사	‘18.06.18 ~‘18.08.16	유아체험시설 조성	*****	‘18.08.16 ~‘20.08.15	2년	황은애
45	서울숲 야외무대 재정비조명설치 공사	‘18.2.23 ~‘18.6.21	조명20등, 제어반1면 설치	*********	‘18.6.21 ~‘19.6.20	1년	강희진

※ 누락된 공사 하자건에 대해서는 각 담당자가 추가하여 하자 조사

Ⅱ		조사 세부내용

❍ 공사별 담당, 소공원 담당, 시공자 입회하에 하자 유무 조사

❍ 시공자 미입회시 자체 하자조사 실시

❍ 하자조사 결과 안전과 직결된 사항 등 중대한 사항에 대하여는   안전통제 및 시공사에 우선 조치 통보

Ⅲ		향 후 계 획

❍ 2018. 9. 19 ~ 10. 31 : 하자조사 및 하자 이행

❍ 2018. 11. 1 : 하자 결과 완료 보고(각 담당별 보고)

Ⅵ		행 정 사 항

❍ 하자이행 완료후 각 공사별 담당은 누적된 하자검사관리부 작성하여 총괄 담당에 통보

❍ 또한 하자담보책임기간 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 최종검사 시행

붙임 : 1. 하자검사 조서.

2. 하자검사관리부. 끝.