위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약 의뢰(성동권역 간선도로 연결체계 개선 기본구상 용역)

1. 우리과에서 추진중인 기술용역에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고, 이에 대한 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역개요

1) 용 역 명: 성동권역 간선도로 연결체계 개선 기본구상 용역

2) 계약업체: 극동엔지니어링(주) 외1개사

3) 계약기간: 2017. 6. 23 ~ 2018. 9. 21

나. 설계변경(정산)내역

구분	당초금액	변경금액	증·감액	비고
계약금액	257,840,000원	255,710,000원	감) 2,130,000원

다. 변경사유: 실정산에 따른 설계자문비 감액

라. 예산과목: [도시개발특별회계] 도로건설, 간선도로망 확충, 금호지역일대 도로연결체계 기본구상, 시설비(401-01)

붙임 : 1) 관련방침 1부.

2) 변경설계서(정산) 내역서 1부.

3) 변경계약 합의각서 1부.  끝.

	도로계획과장
주무관	김대욱		도로시설계획팀장	윤장혁		도로계획과장	09/20 안대희
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로계획과-12161	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8084	/전송		/	deauk0207@seoul.go.kr	/	대시민공개