투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행에 따른 변경계약 의뢰(2018년 한강공원 야외수영장 보수공사-토목분야)

1. 기반시설과-2691호(2018.09.21.)와 관련입니다.

2. 우리본부에서 시행중인「2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행하고 변경 계약을 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 2018년 한강공원 야외수영장 보수공사(토목분야)

나. 계약기간 : 2018. 3. 30. ~ 2018. 9. 30.

다. 도 급 액 : 금608,746,700원

라. 도 급 자 : ㈜에이원에스씨앤알 대표 강희남

마. 감 독 자 : 서울시설공단(공사감독1처)

바. 변경내용

구 분	정 산			비 고
	당 초	변 경	증·감
공급가액	553,406,091	545,600,000	감) 7,806,091
부가가치세	55,340,609	54,560,000	감) 780,609
도급비	608,746,700	600,160,000	감) 8,586,700

사. 설계변경 사유 : 추가 작업지시 및 실정보고 등에 따른 물량 증·감

아. 예산과목 : 한강공원시설 관리및개선, 한강공원 수영장유지관리, 시설비

붙임  1. 설계변경 시행 보고서 1부

2. 설계변경(정산) 보고서(공사감독1처-6620호) 1부.

3. 변경내역서 및 수량산출서 각 1부

4. 계약금액 검증 확인서 1부.  끝.

	시설부장
주무관	박지수		기반시설과장	라철흠		시설부장	09/21 전영주
협조자	주무관	김경화		총무과장	박병현
시행	기반시설과-2693	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가 642-25)	/
전화		/전송	02-3780-0744	/		/	부분공개(5)