문서번호	토목부-16698
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
김구		명경출	09/27 김영수
협조

-강남순환도시고속도로(8공구)-

사토장 추가선정 검토 보고

2018. 9.

도시기반시설본부

토목부

-강남순환도시고속도로(8공구)-

사토장 추가선정 검토 보고

강남순환 8공구 건설공사의 기 선정된 사토장에서 불량 토사 반입 중지를 요청함에 따라 토사 반출을 위해 추가 사토장 선정을 검토 보고 드림

공사개요

□ 위    치: 선암U/D ~ 강남 수서IC

□ 규    모: 폭 4~10차로, 연장 7.96km(교량2개소, 지하차도 4개소)

□ 총사업비: 3,552억원(도급비 239,890백만원)

□ 사업기간: ’02. 7. 3. ~ ’20. 12. 31.

□ 시공사/감리사: 롯데건설㈜ 외 1 / ㈜동명기술공단

사토장 선정 추진경위

□ ’18. 8. 13. : 기존 사토장 토사반입 중지 통보

□ ’18. 9.  3. : 인근 공사 현장 조사

사토장 조사내용

연번	사 토 장	위 치	거리 (km)	반입가능 여부	비 고
1	서울 제물포터널 민간투자사업 1공구	서울시 양천구 신월동	17.79	실트질 토사 반입 불가
2	신분당선 복선전철 1단계(신사~강남)	강남구 신사동	9.95	2021년 반입 가능
3	진접선(당고개~진접) 복선 전철 1공구	경기도 남양주시 별내동	17.83	점토질 토사 반입 불가
4	별내선(암사~별내) 복선전철 3공구	경기도 구리시 수택동	20.98	2020년 반입 가능
5	별내선(암사~별내) 복선전철 4공구	구리시 인창동 440-1	17.95	’18.12. 이후 반입가능

사토장 선정 현황

□ 사토장 현황

구 분	설 계 (수도권 매립지)	기선정		금 회
		송도동	비봉면	갈산동
위 치	인천시 서구 백석동	인천시 연수구 송도동 297	화성시 비봉면 양노리 산152-1	이천시 호법면 동산리 83-4
운반거리 (km)	46.61	49.47	41.23	54.65
왕복시간 (분)	131.59	141.61	106.95	196.93
인･허가 (신고)	신고필	신고필	신고필	사유지
단가 (원/㎥)	12,005			21,234

□ 적용단가 검토

- 금회 선정한 사토장 운반단가는 14,500원/㎥ 적용

※ 당초 계약단가(12,005원/㎥)+불량토사 정지비용(2,495원/㎥)=14,500원/㎥

□ 수량 및 공사비 증·감 현황

구 분	수 량			단위	금 액(천원)
	당 초	변 경	증·감		당 초	변 경	증․감
토공(사토)	3,000	3,000	-	㎥	36,015	43,500
직접공사비					36,015	43,500	-
제 경 비					14,985	18,500	-
도 급 공 사 비					51,000	62,000	11,000

검토의견

❍ 기 선정된 사토장에 토사 반입이 중단되어, 토사 반출을 위해 신규 사토장 선정을 검토한 책임건설사업관리기술자의 실정보고가 타당하므로 승인하고자 하며, 추후 설계변경에 정산 반영하고자 함.

붙임  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.