문서번호	교통운영과-16238
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		교통개선팀장	교통운영과장
차양호		박상구	09/27 강진동
협조
	주무관		박평근

소통개선 사업 예산 감배정 검토 보고 (개봉역사거리 남측)

2018. 9. 27

도시교통본부

교통운영과

소통개선 사업 예산 감배정 검토 보고 (개봉역사거리)

사업 시행 부서로부터 민원에 의해 사업 추진이 어려운 실정임이 보고  되어 이에 대한 조치 계획을 검토하고 보고 드림

□ 관련 근거

○`18.3.29.: 사업 예산 재배정

○`18.7.11.: 사업 반대 민원 사항 이첩(구로구 교통행정과-28799)

○`18.9.20.: 사업 반대 민원 사항 재이첩(구로구 교통행정과-44493)

□ 사업 현황

○ 위치: 개봉사거리 남측

○ 내용: 차로 선형 개선, 버스정류장 이설, 띠녹지 및 방호휀스 제거 등

- 2개 차로에서 1개 차로로 변경되는 구간에 정류소가 위치하여   정차 버스가 직진 차로를 잠식하여 발생하는 정체 해소

○ 소요 예산: 78,480천원

□ 민원 및 처리 경위

○ 민원인: 삼호아파트 입주자 대표회

○ 내용: 버스정류장 이설시 아파트 진·출입이 불편하므로 사업 추진 반대

○ 처리 경위

- `18.7.26.: 정류소 이전 거리 약 6m 축소 등 아파트 불편 사항이 최소화       되는 방안으로 변경토록 회신 (시 → 구)

- `18.9.20.: 주민과 지속적으로 협의하였으나 반대로 인해 사업 추진이        어려운 것으로 판단됨(구 → 시)

□ 조치 방안

○ 사업 시행 유보 및 사업 예산 타사업에 재배정

- 계획과 같이 버스 정류소를 이전하는 경우 소통 개선에 도움이 될      것으로 판단되나, 인접하여 출입구가 있는 아파트 주민의 반대로 사업     추진이 어려운 것으로 판단되므로

- 사업 예산을 감배정하고, 사업 시행 요청이 있는 신규 사업에 재배정     하여 소통개선 사업에 만전을 기하고자 함

·재배정 사업: 남부순환로 까치고개 유턴 및 솔샘사거리 개선사업

○ (감)배정 안                                                 (단위: 원)

배정 부서	당 초	변 경	증 감	비 고
강서도로사업소 (도로보수과)	11,380,000	0	감11,380,000	노면 표시
구로구청 (교통행정과)	67,100,000	0	감67,100,000	토목 공사

○ 예 산 과 목: 도시교통체계및소통개선, 교통안전시설물관리, 도로교통소통개선,  시설비 및 부대비, 시설비

붙임  관련 공문 각 1부. 끝.