문서번호	교통정보과-14294
결재일자	2018.9.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	도로정보팀장	교통정보과장
한동준	최종선	09/27 이수진

『2018년 노후 루프검지기 성능개선 사업』

설계변경 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

교통정보과

(도로정보팀)

『2018년 노후 루프검지기 성능개선 사업』

설 계 변 경   검 토 보 고

‘2018년 노후 루프검지기 성능개선 사업’ 의 설계변경(금액,기간)

내용을 검토하여 보고드림

□ 사업개요

○ 사업명 : 2018년 노후 루프검지기 성능개선 사업

○ 사업기간 : ‘18.04.09. ~ ‘18.10.06.

○ 계약업체 : ㈜유에프엠시스템즈

○ 계약금액 : *********

○ 사업내용 : 노후 루프검지기 94대 성능개선(교체)

- 루프검지기 주제어기(22대), 부제어기(72대)

□ 추진경과

○ ‘18. 01. 31.  : 사업방침 수립 및 과업지시서, 제안요청서 등 검토

○ ‘18. 03. 06.  : 계약심사, 입찰공고 등 사전절차 이행 및 발주

○ ‘18. 04. 16.  : 계약체결(유에프엠시스템즈)

○ ‘18. 04. ~ 07. : 루프검지기 94대 제작 완료

○ ‘18. 09. 07.  : 루프검지기 94대 교체 완료

○ ‘18. 08. ~ 09. : 시험운영 및 시스템 성능 안정화 기간

○ ‘18. 08. 27.  : 차량검지기 성능평가 관련 검토요청(교통정보과-12650호)

○ ‘18. 09. 04.  : 차량검지기 성능평가 관련 검토결과 제출

(서울시설공단 교통정보처-5036호)

○ ‘18. 09. 14.  : 차량검지기 성능평가 의뢰(한국도로공사)

○ ‘18. 09.20. ~ : 성능평가 시행 중

□ 설계변경 내용 검토

○ 설계변경 내용 및 사유

-  차량검지기(VDS) ITS 성능평가 시행비용 증액

· 변경사유 : 루프검지기 장비를 교체함에 따라 국토통합교통체계효율화               법에 의거, ITS성능평가 시행 필요

※ 자동차·도로교통분야 ITS성능평가기준 제 3조 2항, 성능평가 전담기관에 위탁시행

· 계약금액 : 당초(************) →  변경(************)

- 성능평가 시행으로 인한 준공기한 연기

· 변경사유 : 성능평가 수행기간(검사, 평가서 발부, 재검사 등)이                   발생함에 따라, 사업기간 부족으로 준공기한 연기가 필요함

· 귀책소재 : 서울특별시

· 지체상금 부과여부 : 해당 없음(미부과)

· 준공기한 : 당초(2018년 10월 06일)  →  변경(2018년 10월 31일)

○변경내역

(단위 : 원)

구분	당초	변경	비고
계약금액	***********	***********	************
계약기간	2018년 10월 06일	2018년 10월 31일	증) 25일

○ 세부변경내역

품 명	산출근거	단위	당초	변경	증(△)감
ITS 성능평가	[공통비용+(장비설치비용×지점수)] ×기관할인(5%)×부가세(10%)	회	-	1	1

○ 계약금액 변경내역

(단위 : 원)

품명	규격	당초	변경	증(△)감
재료비	물품구매	***********	***********	*
	부가적재료비	*******	*******	*
	소계	***********	***********	*
직접노무비		**********	**********	*
산출경비		*******	*******	*
간접노무비		*	*	*
산재보험료		*******	*******	*
고용보험료		*******	*******	*
건강보험료		*******	*******	*
연금보험료		*******	*******	*
노인장기요양 보험료		******	******	*
산업안전보건관리비		*********	*********	**
기타경비		*	*	*
일반관리비		**********	**********	*
이윤		*********	*********	*
소계		***********	***********	*
센터 통신환경 구성 및 시험		**********	**********	*
합 계		***********	***********	*
부가가치세		**********	**********	*
기타분담금 (성능평가)		*	**********	**********
총 사업비		***********	***********	**********

□ 향후계획

○ 계약부서(재무과) 계약변경의뢰

붙임 1. 노후 루프검지기 설계변경 내역서 1부

2. 차량검지기 성능평가 시행 검토결과 1부

3. 노후 루프검지기 성능개선 사업 실정보고서 1부.  끝.