＂깨끗한 당신이 청렴 성북을 만듭니다＂
		성북구
수신자		내부결재
(경유)
제목	돌곶이로 105 ~ 장위로4길 51-4 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사 - 설계변경(최종)

우리 구에서 시행 중인 「돌곶이로 105 ~ 장위로4길 51-4 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사」에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 돌곶이로 105 ~ 장위로4길 51-4 구간 외 1개소 사각형거 보수보강공사

나. 공사기간 : 2018.05.09. ~ 2018.10.05.

다. 도 급 자 : ㈜자오건설 대표 임철환

라. 설계변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경 후	증 / 감		비고
총 공 사 비	348,582,800	399,690,000	증)	51,107,200
도 급 비	346,582,800	397,750,000	증)	51,167,200
이 전 비	2,000,000	1,940,000	감)	60,000

마. 설계변경 사유 : 별첨

바. 예산과목	: 〔 공기업특별회계 : 물순환안전국 물재생계획과〕

- 사업비용, 영업비용, 관거비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1) 설계변경 사유서 1부.

2) 설계변경 내역서 1부.

3) 제비율 검증표 1부.

4) 방침서 각 1부.  끝.

주무관							오강일				하수담당					김익기					치수과장					송기민					안전건설교통국장						09/27 하순호
협조자				주무관							임상철					계약담당							이계웅					재무과장								김영임
시행			치수과-14859										(						)		접수												(						)
우	13670					서울 성북구 삼선동5가 성북구청 411 (보문로 168)																/			http://www.seongbuk.go.kr
전화									/전송			02-2241-6563					/														/	대시민공개