투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울시 중구 퇴계로36가길 104 공간종합건축사사무소 대표 박 윤 석 귀하
(경유)
제목	서울애니메이션센터 재건축 설계용역관련 승인 통보

1. 공간제2018-0450(2018. 9. 20)호와 관련입니다.

2.「서울애니메이션 재건축공사 설계용역」관련 설계자로부터 부지내 존치 건물로 인하여 대지 경계점 표시할 수 없으므로 택지개발 예정지적 좌표도 작성이 필요하므로 추가 측량 요청사항에 대하여 승인 통보하오니 용역 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

3. 당초 변경계약 설계 예정공정표에 따라 실시설계 및 건축심의,경관심의,공용건축물 협의가 완료(‘18.12월)될 수 있도록 용역추진하시어 ‘18.12월 설계용역 지연으로 관계규정에 의한 불이익 처분되지 않도록 각별히 유념하시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김찬유		건축총괄과장	박범규		건축부장	09/27 임인구
협조자	실무사무관	임형준
시행	건축부-13728	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2605	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)