문서번호	기전과-5457
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박신범		09/28 정판식
협조

『2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

작업지시(2차) 계획 보고

2018. 9.

동부도로사업소

(기전과)

『2018년 동부 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)』

작업지시(2차) 계획 보고

우리사업소에서 관리하는 교통안전시설물(교통신호기)의 횡단보도 신설에 대하여 아래와 같이 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

1		교통안전시설물 현황

교통신호기

계	제어기	신호등	음향신호기	잔여시간표시기	비고
14,647	653대	9,764조	2,065대	2,165대

2		공사개요

공 사 명 : 2018년 횡단보도 교통신호기 신설 및 개량공사(연간단가)

공사개요 : 강남구 외 3개구 횡단보도 신설에 따른 교통신호기 설치

(차량등, 보행등, 잔여시간표시기, 음향신호기 등)

계약기간 : 2018. 3. 7. ~ 12. 28.

계 약 자 : (유)공간전기 대표 황영선

계약금액 : 금444,151,740원

감리업체 : 대영유비텍(주) 대표 조근환

3		작업지시 계획

작업차수 : 작업지시 2차

작업기간 : 2018. 9. 28. ~ 12. 10.

작업지시 내용(2차)

연번	관련근거	위치	작업지시내용	비고
1	교통관리과-16052 (2017.06.13.)	송파구 거여동 174-5	- 디자인 통합지주(차량+보행+가로등) 1본 신설 디자인주(차량+보행) 1본 신설 음향신호기 2대 신설	1차 작업 취소건
2	교통관리과-24910 (2017.08.31.)	송파구 오금로 191	- 디자인 통합지주(차량+보행+가로등) 2본 신설 - 음향신호기 2대 신설
3	교통관리과-27589 (2017.09.25.)	송파구 잠실7동 올림픽로4길	- 디자인주(차량+보행) 1본 신설 - 디자인주(차량) 1본 신설 - 디자인주(보행) 1본 신설 - 음향신호기 2대 신설
4	교통관리과-4984 (2018.03.02.)	서초구 내곡동 188-4 (헌릉로 안골마을 앞)	- 교통신호제어기 1대 신설 - 디자인주(차량+보행) 2본 신설 - 음향신호기 2대 신설
5	교통관리과-15698 (2018.6.26.)	강동구 상일동 503	- 교통신호제어기 1대 신설 - 디자인주(차량+보행) 2본 신설 - 음향신호기 2대 신설
6	교통관리과-16017 (2018.06.29.)	송파구 마천동 127-9	- 디자인주(보행) 2본 신설 - 음향신호기 2대 신설

작업완료보고서 제출기한 : 2018. 12. 10.(월)

4		향후계획 및 행정사항

시공사 및 감리업체에 위 사항을 통보하여 기한내 완료토록 지시

시공물량은 작업완료 보고서에 따라 설계변경 및 정산처리

붙 임 : 작업지시서(2차) 1부.  끝.