투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(건설사업관리기술자(기계) 투입일정 변경 승인(마곡산업 공공지원센터 건립))

1.업무지시현장 : 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(장기1차) (주)토문엔지니어

링 건축사사무소, 마곡산업단지 공공산업지원시설 건립공사(장기1차)

주식회사 희림종합건축사사무소

2.작 성 일 자 : 2018-09-28 14:09:07

3.지 시 내 용

: 토희마CM-50호(2018.09.13.)와 관련입니다

“마곡산업단지 공공지원센터 건립공사” 지열시스템 착공일정 변경과 관련하여 기계분야 건설사업관리기술자를 당초 10월1일부터 배치에서 12월 이후 배치로 “승인”하니 세부 배치일정을 검토보고 하시기 바랍니다

※ 아울러 지열천공 착공 10일 이전에 현장 투입하도록 배치계획 작성바람

끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시

One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							추한영			열빛총괄과장					09/28 유병기
협조자
시행			설비부-13345									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어 플레이스 빌딩 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화		02-3708-8605						/전송			02-3708-8659					/	cc2436@seoul.go.kr												/	대시민공개