문서번호	시설보수과-7445
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장
김규춘		전결 09/28 박병연
협 조
	주무관			윤동원
	주무관			강연홍
	주무관			김승진
	주무관			조정갑

작업완료보고 (제2,4차)

“2018년 도로시설물 일상유지보수공사 (교량,고가 등)”

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

작업완료보고(제2,4차)

2018년 도로시설물 일상유지보수공사(교량,고가등)

2018년 도로시설물일상유지보수공사(교량,고가등) 작업완료보고(제2,4차)에 따른 검토결과 보고 임

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 2018년 일상유지보수공사(교량,고가등)-강서

❍ 공사개요 : 총34개시설(교량21, 고가7, 램프6)

❍ 공사기간 : 2018. 4. 13 ~　12. 31

❍ 공사금액 : 1,082,106천원

❍ 계 약 자 : 유남종합건설(주) 대표 우상선

❍ 공 정 율 : 78%

□ 작업지시 완료 내역

❍ 관련근거

차수	작업지시		작업완료		비고
	관련근거	작업기간	관련근거	접수일
2차	시설보수과-6268 (2018.8.14)	2018. 5.18 ~ 8.15	유남종합건설 2018-강서011	2018.8.14
4차	시설보수과-7275 (2018.9.19)	2018. 7.30 ~ 9.30	유남종합건설 2018-강서016	2018.9.19

❍ 2차 작업지시 및 완료 내용

- 대상시설 : 도림교외 5개 시설

- 개략공사비 : 152,952천원

- 세부작업내역

연번	시설명	위치 및 손상내용	작업완료내역	수량			단위	작업조건
				당초	완료	증,감		주간	야간
1	도림교	A1 하부 점검통로 미설치	점검통로설치 A-TYPE (스텐레스)	42	42	-	m	○
			점검사다리설치 (하향식, L=5m)	1	1	-	개소	○
			교량하부 전등철거및재설치	-	1	1	식	○
		P2 교각 가로보 파손	콘크리트단면보수(T=30㎜)	0.84	0.12	-0.72	㎡	○

2	오금교	본교 진입램프 교량구간 포장면 망상균열	절삭후 아스팔트 덧씌우기	1.52	1.52	-	a		○
			교면방수-도막식	151.7	152.0	0.3	㎡		○
			교량상판보수(MMA,T=30㎜)	30.3	32.2	1.9	㎡		○
			유공관 및 성형줄눈설치	37	38	1	m		○
			주입줄눈공	37	38	1	m		○
		A1 교대 벽체 오염	고압물세척	108	108	-	㎡	○
		A1 교대 흉벽부 철근노출	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	0.3	0.8	0.5	㎡	○
		램프 좌측 배수관 탈락	강관배관	12	15	3	m	○
			곡관배관	4	5	1	개소	○
			레듀사	2	2	-	개소	○
3	오목교	P12 교각 강관배관 길이부족 및 노후	강관배관	2	10	8	m	○
			곡관배관	-	3	3	개소	○
			레듀사	-	3	3	개소	○
4	개봉 철도고가	오류IC방향 S3, S6 상부 포장 망상균열	소규모포장복구	57	55.7	- 1.3	㎡		○
			교면방수-도막식	57	55.7	- 1.3	㎡		○
			교량상판보수(MMA,T=30㎜)	57	55.7	- 1.3	㎡		○
		A1 양방향 신축이음 누수 고무덮개판 파손	방호벽차수보수공 Joint	2	2	-	m		○
		오류IC방향 A1 신축이음 후타재 파손	후타재보수	8	-	- 8	m		○
			신축이음장치보수공(NMC50#)	-	5.4	5.4
		S6-G7~G8 바닥판 하면	콘크리트 표면보수	8	5.8	- 2.2	m		○
		P3 신축이음 하부G8~G9	콘크리트 표면보수	0.4	0.5	0.1	㎡	○
		오류IC방향 A1측 하부	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	1.8	0.5	- 1.3	㎡	○
		P2 신축이음 하부	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	0.6	0.5	0.1	㎡	○
		P3 신축이음 하부	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	2.4	2.2	- 0.2	㎡	○
		P5 신축이음 하부	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	1.9	2	0.1	㎡	○
		오류IC방향 S2, S4	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	-	1.5	1.5	㎡	○
		오류IC방향 S6-G9 하부	콘크리트 단면보수(T=30㎜)	-	0.5	0.5	㎡	○
		오류IC방향S1,S6 구로IC방향S1체수불량	교량배수구설치(천공Φ50㎜)	3	2	-1	개소		○
		A2측 하부 비탈면 점검계단 미설치	비탈면점검계단설치(블록식)	25	9.5	-15.5	㎡	○
		S3~S6 거푸집 미철거	거푸집제거(일일노무)	4	3	-1	개소	○
		오류IC방향 시점부	방호벽정비(일일노무)	-	1	1	일	○
		교량 상부	안내표지판철거(일일노무)	-	1	1	일	○
5	구로고가	고가 하부 코핑부 철판파손	긴급출동(철판제거)	1	1	-	회	○
6	영등포 RIC	고가 점검통로 철판파손	긴급출동(철판제거)	1	1	-	회	○

❍ 4차 작업지시 및 완료 내용

- 대상시설 : 서울교외 8개시설

- 개략공사비 : 78,974천원

- 세부작업 내역

연번	시설명	위치 및 손상내용	작업완료내역	수량			단위	작업조건
				당초	완료	증,감		주간	야간
1	서울교	교량 상부	교량점검사다리 출입문 설치	14	14	-	개소	○
2	개봉교	교량 상부		3	3	-	개소	○
3	가리봉철도	교량 상부		2	2	-	개소	○
4	오금교	교량 상부		5	5	-	개소	○
5	오목교	교량 상부		13	13	-	개소	○
6	여의2교	교량 상부		5	5	-	개소	○
7	도림교	교량 상부		3	3	-	개소	○
8	구로1교	교량 상부		2	2	-	개소	○
9	행주IC교	교량 상부		2	2	-	개소	○

□ 주요 점검사진

도림교 점검통로 설치	오금교 교면포장	서울교 점검출입구 설치	여의2교 점검출입구 설치

□ 검토의견

❍ 작업지시 보고 내용 검토 및 확인결과 적정 시공 되었기에 향후 설계변경 시 반영

처리코자 함.

따로붙임  작업완료보고(제2,4차)서류 1부(별도첨부).  끝.