문서번호	기전과-5440
결재일자	2018.9.28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
유영선		09/28 정판식
협조

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수 공사(연간단가)』

제3차 작업지시 실정보고 검토 보고

2018. 09.

동부도로사업소

[기 전 과]

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)』

제3차 작업지시 실정보고 검토 보고

『2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 제3차 작업 추진중에 실정보고가 접수되어 검토하고 그 결과를 보고함.

1. 관련근거

❍ 2018년 동부2구역 유지보수공사(연간단가) 3차 작업지시

- 기전과-3527(2018.06.28.)호

❍ 3차 작업지시 실정보고서 제출 건

- 대영유비텍 대영GE 18B-09-26(2018.09.27.)호

2. 공사개요

❍ 공 사 명: 2018년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)

❍ 공사내용: 송파구, 강동구 교통신호기 유지보수 1식

❍ 계약업체: 주)한창기전 대표 임창순

❍ 계약금액: 금642,298,450원(금육억사천이백이십구만팔천사백오십원)

❍ 계약기간: 2018. 3. 7. ~ 2018. 12. 28.

❍ 감리업체: 대영유비텍㈜

3. 제3차 작업지시 내용

❍ 작업기간: 2018. 7. 2. ~ 2018. 10. 31.

❍ 작업대상: 송파구 토성초교 외 17개소, 안전공사 점검 부적합 정비 등

4. 실정보고 내용

교차로명	현황 및 문제점	감리 의견	검토결과	비고 (천원)
토성초교 교차로	- 신호지주 기존 기초를 철거하고 신설토록 설계에 반영되었으나 민원 으로 굴착이 불가 기존 기초에 디자인지주 베이스 규격이 맞지 않음	- 기존 기초를 재사용하고 디자인지주를 기초 규격에 맞는 용융지주로 변경 설치	적정	감) 5,620

5. 조치의견

❍ 감리업체로부터 접수된 실정보고에 대하여 검토한 결과 감리의견이 적정하다고 판단되어 실정보고를 승인하고 추후 정산하고자 함.

붙  임 : 감리업체 제3차 작업지시 실정보고 1부.  끝.