문서번호	운영과-8747
결재일자	2017.9.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
이창하		정종기	09/22 이인근
협 조

시설현대화 슬러지처리비 부과계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2017. 9.

중랑물재생센터

(운영과)

시설현대화 슬러지처리비 부과계획

시설현대화 준공연기로 인한 슬러지처리비용 부과관련 산출 결과를 보고드림

□ 부과개요

○ 사용기간 : ’17. 4.29 ~ 8.31

○ 부과내용 : 시설현대화 운영비중 슬러지처리비

○ 부과대상 : (주)GS건설

○ 부과금액 : 200,130천원

□ 세부내역

○ 시설현대화 슬러지처리비용

구 분	비 용(천원)	비 고
인건비(농축,소화,탈수)	475,128
농축약품비	390,828
탈수약품비	561,184
건조시설	656,832
슬러지운반비	444,041
슬러지매립비	4,510,696
계	7,038,709
시설현대화 슬러지 비율(%)	2.843
시설현대화 슬러지처리비	200,130	’17.4.29 ~8.31

○ 산정방법

- 시설현대화 슬러지처리비 = 전체 슬러지처리비용 × 시설현대화 슬러지비율(%)

▶ 시설현대화 슬러지 비율(%) = 2.843%

= ( 시설현대화 DS *100 /전체하수 슬러지 DS )

▶ 인건비 (농축, 소화, 탈수시설) = 475,128천원

= 소화조 근무자(261,858천원) + 탈수기동 근무자(213,270천원)

▶ 농축, 탈수약품비 = 952,012천원

= 농축약품(390,828천원) + 폴리머, 폴리테츠 탈수약품(561,184천원)

▶ 건조시설 운영비 : 656,832천원

= 전력비 + 내부 운반비 + 관리대행비 - 건조슬러지 판매

▶ 슬러지 매립운반비용=4,954,737천원

= 운반비(444,041천원) + 매립비(4,510,696천원)

- 슬러지처리시설 전력비는 농축, 탈수, 소화시설의 전기사용량

계측시설 미설치로 산정이 불가하여 부가 제외하고자 함

□ 조치계획

○ 시설현대화 슬러지 산정내역을 시설보수과에 통보(’17. 9.22)

붙임 : 세부내역 1부.  끝.