문서번호	자원관리과-10151
결재일자	2018.8.27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
★담당자	장비관리팀장	자원관리과장		서울종합방재센터소장
장순성	배미순	조규관		08/27 이성묵
협 조
	경리팀장		양철근
	민방위경보통제소장		이방우
	전산통신과장		정문수

애니메이션센터 재건축 관련
민방위경보통제소 사무실 재배치 공사 및 이전 계획

서 울 종 합 방 재 센 터

【 자 원 관 리 과 】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

애니메이션센터 재건축 관련

민방위경보통제소 사무실 재배치 공사 및 이전 계획

애니메이션센터 재건축으로 서울종합방재센터 별관에서 서울소방재난본부 6층으로 이전하는 민방위경보통제소 사무실을 쾌적하고 효율적인 사무공간으로 조성하기 위한 계획임

Ⅰ		관 련 근 거

市 문화융합경제과-3359(2018.04.02)호 『서울애니메이션센터   재건축 사업 추진계획 알림

소방행정과-18194(2018.07.26)『민방위경보통제소

사무실  이전예산확보 계획』

자원관리과-8839(2018.07.26.)『민방위경보통제소  사무실  이전에

따른 예산전용 신청』

소방행정과-18348(2018.07.30)『예산전용 신청결과 통보』

Ⅱ		추 진 방 향

애니메이션센터 재건축 철거 전 민방위경보통제소 신속 이전

소통과 집중이 동시에 가능한 쾌적하고 편리한 공간 조성

개인 사물과 서류를 정리할 수 있는 개인별 수납공간 마련

사무공간의 리뉴얼과 가구의 재 배치로 인한 실용적인 공간을 도모

Ⅲ		세부추진계획

1		이 전 현 황

구분	現 사무실		이전 사무실
장소 (위치)	서울종합방재센터 별관 (중구 소파로 130, 2층)		서울 소방재난본부 6층 (퇴계로26길 52, 6층 일부)
면적	총 880.57㎡ 중 259㎡ 사용		172㎡ 사용
사용 목적	소장실, 사무실, 문서보관실, 경보장비자재보관실 등		소장실, 사무실, 창고 등
인원	상주인원 23명		상주인원 23명 동일

2		사업개요

민방위경보통제소 사무실 재배치 공사

□ 장소 및 사용면적 : 서울소방재난본부 6층(사용면적 : 172㎡)

□ 공사기간 : 2018. 8. 31.  ~ 9. 13.(예정)

□ 규    모 : 가설공사, 철거 및 기타공사, 도장공사, 목공사,

전기공사(등기구 교체시공), 철거면 보수공사, 바닥공사,

도배 및 필름공사, PC통신설비 및 일반전화설비 등

□ 사업내용

장 소	사용면적	공사내용	비 고
소장실	36㎡	기존 벽체, 문틀 철거후 지정거리에 벽체 신설 및 출입구 설치 문서고 출입구 폐쇄 천정 파손부분 보수 및 점검구 설치 천정 텍스면 보양 후 페인트 마감 기존 사무실의 등기구를 기존 낡은 등기구와 교체 벽체 도배 바닥 데코타일

사무실	136㎡	현재 공간을 3개의 실로 구획 기존 사무실의 등기구를 기존 낡은 등기구와 교체 실 분할에 따른 조명 회로 및 스위치 재설치 천정 페인트 벽체 도배 보조출입문 폐쇄

※ 공통항목 : PC통신 및 전화설비 등 이전공사

민방위경보통제소 사무실 이전

□ 일    시 : 2018. 9. 14. (금) ~ 9. 18.(화) (예정)

□ 장    소 : 서울소방재난본부 6층

□ 이전대상 : 민방위경보통제소 보유 장비 일체 및 물품

□ 이전방법 :

PC통신설비 : 기존 행정망 활용 인입하여 개인별 컴퓨터에

인입될 수 있도록 네트워크 설치

전화설비 : 일반전화, 행정전화, FAX 각 회선별·부서별 연결

책상등 사무실 보유장비 및 물품 : 전문 이사업체

문서고 보존서류 : 전문 이사업체

3		재배치(안)

[이전장소(소방재난본부 6층)]

[재배치후]

소장실
민방위경보통제소 사무실

Ⅳ		예산조치 계획

1		소요예산

소요예산 : 금70,000,000원(금칠천만원) - 부가세 포함

□ 재배치 공사 : 금44,000,000원(금사천사백만원)

가설공사(자재 소운반 등)

철거 및 기타공사(에어컨 이전설치 등)

도장공사(페인트 등)

목공사(석고보드 수용성 목재보수재등)

전기공사(내선전공 및 등기구 시공등)

철거면 보수공사(천정,벽,바닥등 보수작업)

바닥공사(데코타일 등)

도배 및 필름공사(도배지,시트지 등)

PC통신설비 및 일반전화설비등

□ 사무실 이전 및 소모품 : 금11,000,000원(금일천일백만원)

□ 노후된 사무실 집기류 구매 : 금15,000,000원(금일천오백만원)

2		예산내역

구분			소요 예상액	비고
세부사업	통계목	사업명	70,000,000
민방위경보 시설 확충 및 보수	시설비	재배치 공사	44,000,000
	사무관리비	사무실 이전 및 소모품	11,000,000
	자산 및 물품취득비	사무실 집기류	15,000,000	조달청 별도 구매

Ⅴ		계약추진

1		공사 및 이전

계약방법 : 나라장터를 통한 전자수의시담(G2B)

□ 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률

시행령 제25조 제1항 제5호 마목

2		집기류등 물품

계약방법 : 나라장터를 통한 조달구매

3		추진계획

사업발주 : 2018.08월

입찰 및 계약 : 2018.08월

착수 및 완공 : 2018.08.월 ~ 2018. 9월 중순

Ⅵ		행정사항

민방위경보통제소 소장은 사무실 이전에 따른 제반사항(이전   물품관리)에 대해 관리감독에 철저를 기하여 주시고,

전산통신과장은 사무실 재배치 공사후 업무에 차질이 없 도록 통신시설 등 관련사항을 협조하여 주시기 바랍니다.