내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장)
(경유)
제목	용역의 일시정지 요청(서울시네마테크 건립 설계용역)

1. 도시기반시설본부 건축부-12063(2018.8.24.)호 및 건축부-12216(2018.8.28.)호와 관련입니다.

2.「서울시네마테크 건립 설계용역」과 관련하여 현재 추진중인 용역사업의 원활한 과업수행을 위해 아래와 같이 설계용역의 일시정지를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 개요

1) 용역명 : 서울시네마테크 건립 설계용역

2) 계약자 : 주식회사 건축사사무소 매스스터디스(대표 박기수)

3) 계약금액 : 859,730,000원

나. 용역 일시정지 개요

1) 기존 용역기간 : 2018.5.11.~2019.4.5.

2) 일시정지 기간 : 2018.10.1.~재착수 요청일

※ 최장기간 60일 이내

3) 재착수일: 향후 재착수일 별도 요청 예정

**********

********************************************************************

*****************************************.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태동		영상산업팀장	박경민		문화융합경제과장	09/28 최판규
협조자
시행	문화융합경제과-10060	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	부분공개(5)