문서번호	토목부-16781
결재일자	2018.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
이한규		여용석	09/28 김영수
협조
	주무관		박상철

건설사업관리 용역 설계변경 시행(1차4회)

(밤고개로 확장공사외 1개소)

2018. 9.

도시기반시설본부

(토 목 부)

건설사업관리용역 설계변경 (1차4회)검토보고

(밤 고개로 확장공사외 1개소)

『밤 고개로 확장공사 외1건 감독권한대행등 건설사업관리용역』에 대하여 감리원 투입 및 기술료 조정분 설계변경 시행 하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 밤고개로 확장공사외 1 감독권한대행 등 건설사업관리용역

○ 규    모 : 도로확장 6차로→7~8차로, 총연장 L=2.45km

○ 용역기간 : 2017.1.9.~2018.12.31.(1차:‘17.1.9.~’18.9.30.)

○ 용 역 비 : 1,781백만원(1차:1,617백만원)

○ 감 리 사 : (주)제일엔지니어링종합건축사사무소 외 1

□ 설계변경 검토

○ 1차 감리용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비고
1차(4회)	용역비	1,661,400,000	1,633,600,000	감 27,800,000	종로BRT
	용역기간	‘17.1.9.~’18.9.30.	‘17.1.9.~’18.9.30.	변경없음

- 종로BRT 감리용역 변경 현황(1차)

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
도 급 액	456,200,000	428,400,000	감 27,800,000
1. 직접인건비	230,024,594	230,024,594
2. 제경비	103,833,101	103,833,101
3. 기술료	33,313,765	12,041,038	감 21,272,727
4. 직접경비	43,555,813	43,555,813
5. 손해배상보험료	4,000,000	-	감 4,000,000
6. 공급가액	414,727,273	389,454,546	감 25,272,727
7. 부가가치세	41,472,727	38,945,454	감 2,527,273

○ 변경사유 : 종로 중앙버스전용차로 공사는 단순공정으로 기술료 조정(감액)

- 용역 변경 현황

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
밤고개로 확장공사 감리용역	1,205,200,000	1,205,200,000	변경없음
종로 중앙버스전용차로 설치공사 감리용역	456,200,000	428,400,000	감 27,800,000	교통운영과예산
합 계	1,661,400,000	1,633,600,000	감 27,800,000

※ 예산현황

- 밤고개로 확장공사 예산(도시개발특별회계, 세입세출외 현금) 변경없음

- 종로BRT(교통운영과 예산) 감 27,800천원 반영

□ 조치의견

○ 종로 중앙버스전용차로 공사는 감리 기술료 조정 분(감 27,800천원) 반영하여 준공함이 타당하다고 사료됨.

붙임 : 1) 감리검토 의견서 1부.

2) 설계변경 내역서(1차) 1부.  끝.