문서번호	물재생시설과-12700
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
전문관	물재생시설팀장	물재생시설과장		물순환안전국장
양해선	代양해선	이철범		10/01 배광환
협 조
	물재생계획과장		하상문
	예산4팀장		김삼현

중랑물재생센터 시설현대화 2단계 사업 계획

2018. 9

물순환안전국

(물재생시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

중랑물재생센터 시설현대화 2단계 사업 계획

시설 노후, 환경기준 강화에 대비하고, 도심지 고 부가가치 토지를 생산적으로 활용을  위한 중랑물재생센터 현대화 2단계 사업 계획을 보고드림

□ 추진배경

○ 시설노후, 물재생센터 방류수 수질기준 강화에 대비

○ 기피시설을 열린 친환경 활력공간으로 조성

○ 초기우수처리 연차별 확충 및 분뇨처리 시설지하화

○ 도심지 고 부가가치 토지 생산적 활용 기틀 마련

□ 시설현황

○ 물재생시설 현황

구분	시설용량		처리공법	건설기간
	하수(만㎥/일)	분뇨(㎘일)
계	159	4,000
1처리장	25	-	생물막여과	‘09. 2 ～ ’18. 5
2처리장	46	-	A20	‘04. 8 ～ ’07.10
3처리장	78	-	MLE	‘83.12 ～ ’92.12
4처리장	10	-	표준활성슬러지	‘92.12 ～ ’97.10
분뇨처리	-	4,000	전처리+하수연계	‘76.12 ～ ’09. 2

○ 하수도법 방류수 수질기준과 현재 처리현황

(단위 : mg/L, 개/㎖)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균균수	비 고
’08년 이후	10이하	40이하	10이하	20이하 (동절기 60)	2이하 (동절기 8)	3,000이하	서울시 (Ⅲ지역)
’12년 이후	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하
고도처리수	5.5	7.5	3.7	13.36	0.16	387	일평균(‘17년)

※ 지속적 수질기준 강화 예상

□ 그간의 추진사항

○ ’07. 3.26 : 중랑물재생센터 시설현대화 방안 보고

- 현대화시설 105만㎥/일 중 1차사업 25만㎥/일 우선 시행

※ 46만㎥/일 기 시행

○ ’07. 6 ~ ’08. 6 : 시설현대화 1단계 기본계획 용역

○ ’09. 2 ~ ’18. 5 : 시설현대화 1단계 사업

○ ’17. 8 ~ : 시설현대화 2단계 기본계획용역 중

- 용역기간 : ’17. 8 ～ ’18. 10(’18. 12월 연기예정)

□ 현대화 추진방향

○ ************************************

*******************************

【방류수 수질기준 강화】                                        (단위 : mg/L, 개/㎖)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균균수	비 고
수질기준	10이하	40이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	서울시 (Ⅲ지역)
****	***	****	***	****	*****	*******

주) T-N : 일평균 기준, 순간농도 15mg/L

○ 현대화 사업은 무중단 공사시행을 위해 단계 나눠 단계별 시행

- ******************************************

○ ********************************

- 시설상부 활용을 위한 사업방식 검토 시행

○ 유지관리성을 고려하여 시설은 지하화, 반지하화로 구분 설치

- 주요 악취발생 시설은 지하화, 기타 수처리시설은 반지하화 설치

○ 초기우수 처리시설 병행 건설

○ 악취 근원적 방지를 위한 시스템 도입

○ 에너지 자립률 향상

□ 현대화 추진계획

○ 현대화 규모 : 총 88만㎥/일(25만㎥/일 1단계 완료, 46만㎥/일 기 고도처리)

단계별	사업규모	처리용량 (만㎥/일)	사업기간	사업비(억원)
계			’19.3∼’37.12	18,526
***	**************** ************** *************	********* ********* **********	************	*****
***	************* ***************************	*********************	*************	*****
***	************* *****************	*****************	*************	*****
***	************* *****************************	******** ********	*************	*****

※ 시행계획도

****

○ 금회 2단계 사업시행 계획

- *****************************************

- ***************

- ***********************

□ 연차별 투자계획 및 투자재원

○ 연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분	계	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
중랑 2단계	6,079	30	1,000	1,170	1,000	1,000	1,000	879

○ 투자재원 : 전액 공기업 하수도사업특별회계 예산으로 투자

□ 발주방법

○ ******************************

- *********************

□ 향후 추진계획

○ ’18. 10 : 투자심사

○ ’18. 12 : 기본계획 수립(용역) 준공

○ ’19.  2 : 기본설계 용역 발주

붙임 : 공기업 하수도사업특별회계 연차별 세입 및 세출계획 1부. 끝.