문서번호	정보통신보안담당관-19343
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		통신인프라팀장	정보통신보안담당관
최인호		김진하	10/01 김완집
협조

초고속정보통신 고도화 세부작업계획

2018. 10.

정보통신보안담당관

(통신인프라팀)

초고속정보통신망 고도화 세부작업계획

「서울시 초고속정보통신 행정망 및 무선망 고도화」사업과 관련하여 기 운영 중인 행정 및 무선망 장비의 서비스 무중단 운영을 위해 아래와 같이 세부작업계획을 수립하여 추진하고자 함

Ⅰ		고도화 개요

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 서울시 초고속정보통신 행정망 및 무선망 고도화

❍ 사업기간 : 2018.8.7. ~ 2018.12.5.

❍ 계약금액 : 금1,587,300천원

❍ 계 약 자 : ㈜콤텍정보통신

❍ 사업내용

- e-Seoul Net 백본스위치 교체	: 12대(자치구12)

- u-Seoul Net 무선망 백본스위치 교체 : 30대(본청2,사업소3,자치구25)

- 행정정보통신망 백본스위치 교체	: 2대(본청)

□ 추진경과

❍ 계약 및 착수	: ´18.8.7

❍ 현장실사, 광코어 대조, 광레벨 측정	: ´18.8.8 ~ 9.21

❍ 착수보고회 개최	: ´18.9.3

❍ e-Seoul Net 구간 시험장비 설치 운영	: ´18.9.12 ~ 9.27

❍ 백본스위치 입고	: ´18.10.1 ~ 10.12

- ******************************** (예비 장비 포함)

□ 고도화 전후 비교

❍ e-Seoul Net(행정망)

구분	현재	고도화 후	비고
*******	*	*
***	**************	**************
******	***************	*************** ***********************
*******	*************************** ***********	*************************** ***********
****	************** *****************************************************	************** *******************

❍ u-Seoul Net(무선망)

구분	기 존	고도화 후	비고
*******	*	*
***	**************	**************
******	***************	***************
*******	*********** ***********	********* **********************
****	************** **************	************** **************

Ⅱ		세부추진계획

□ 작업개요

❍ 작업개소 : e-Seoul Net (12개 기관 12대)

u-Seoul Net 무선망(29개 기관 30대)

❍ 작업기간 : ************************

❍ 작업시간 : 10시 ~ 22시

- 사전작업  (10:00 ~ 19:30)	: 케이블 포설, 장비 장착 및 설치작업

- 절체작업  (20:00 ~ 20:30)	: 회선절체 작업

- 서비스확인(20:30 ~ 22:00)	: 인터넷 접속 및 업무서비스 상태 확인

❍ 서비스 중단

- 중단업무 : 작업기관 내부 행정망, 직원 인터넷 및 무선망 대시민서비스 사용

- 중단시간 : 작업시간 중 30초 내외

❍ e-Seoul Net 행정망 장비 교체계획 (3개 서브링)

**	**********
	***************************************************************
**		**		**
***************		***************		*****************
**		**		**
******************		***************		********************

❍ u-Seoul Net 무선망 장비 교체계획 (메인링 및 서브링 전체)

**	**********
	*********************************************************************
**		**		**
************************		***************		*****************
**		**		**
************************		***************		********************

□ 기관별 작업일정

*****	****	****	***
******	**********	***********	*********
******	**********	***********
*******	**********	***********
******	**********	***********
**********	**********	***********
********	**********	***********	***************
******	********************	***********
******	********************	***********
******	********************	***********
*******	********************	***********
******	********************	***********	***** ***
******	********************	***********
******	********	***********
**********	********	***********
**********	********	***********

Ⅲ		향후계획

❍ 기관별 작업안내 공지	: ´18.10.2.

❍ 행정망 및 무선망 백본스위치 교체	: ´18.10.10. ~ 10.30.

❍ 행정정보통신망 백본스위치 교체	: ´18.11.5. ~ 11.7.

❍ 네트워크관리시스템(NMS) 설치	: ´18.11.7. ~ 11.9.

❍ 시험운영 및 운영자 교육	: ´18.11.12. ~ 12.5.

붙 임	: 작업계획서 1부.