문서번호	교량안전과-17076
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정성민		손창익	10/01 김종호
협조	기술점검팀장		박영권
	강남일반교량팀장		이홍재

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경 자문회의 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

교량안전과

(강북일반교량팀)

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경 자문회의 계획

본 공사와 관련 설계변경에 대한 긴급 설계변경 사유의 타당성, 물량변경의 적정성 등을 검토하기 위한 설계변경 자문회의를 아래와 같이 개최코자함

관련 근거

❍ 교량안전과-15181호(2018.8.29.) “설계변경 자문회의” 운영계획

❍ 감리18-995호(2018.10.1.) 설계변경(제1회) 검토의견서 제출

공사 개요

❍ 공 사 명 : 응봉교 교량점검시설 등 설치공사

❍ 공사기간 : 2018. 6.11 ~ 2018.10. 8

❍ 공사내용 : 종방향 점검로 설치 463m, 조류방지망 설치 500㎡

❍ 총공사비 : 556,756천원 (도급비 565,215천원 이전비 1,541천원)

❍ 시공/감리 : 원세건설(주) / (주)유신 외 1개사

설계변경자문회의 개요

❍ 일    시 : 2018.10. 2.(화) 10:30 ~

❍ 장    소 : 교량안전과 회의실

❍ 위원구성

- 위원장 : 참석위원 중에서 호선

- 위  원

․  내부(4) : 강남일반교량팀장, 기술점검팀장, 6급 송시영,6급 이회진

․  외부(1) : 한강교량 보수보강공사 건설사업관리단장 이용성

- 간  사 : 강북일반교량팀 정성민

❍ 자문사유 : 설계변경 1회당 순공사비 3,000만원 증액시

❍ 자문내용 : 설계변경 사유 및 물량변경의 적정성 등

주요 설계변경사항

❍ 설계변경 사유 : 민원사항에 따른 조류방지망 긴급 추가 설치

- 관련 공문 : 성동구청 토목과-8287호(2018.08.14.)

❍ 주요 물량증감내역 : 조류방지망 추가 설치

- 당초 : 500㎡ ⇒ 변경 : 1,605㎡ (증 1,105㎡)

❍ 총공사비 증가 : 88,184천원

구 분	공 사 비(단위 : 천원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
총공사비	566,756	654,940	증) 88,184
도 급 비	565,215	654,940	증) 89,725
이 전 비	1,541	-	감) 1,541

행정사항

❍ 자문결과에 따라 설계변경 시행 후 준공 처리

붙임 1. 설계변경 자문회의 개최 사유서 1부.

2. 감리단 실정보고서 1부.  끝.