문서번호	도시철도사업부-9213
결재일자	2018.10.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		신교통1과장	도시철도사업부장
왕태현		위성환	10/01 박동룡
협 조

「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고 보고

2018. 10.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」

물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토 보고

「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청이 있어 검토 보고 드림.

1		공 사 개 요

❍ 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사

❍ 위    치 : 강동구 암사동 ～ 현대홈타운앞

❍ 규     모 : 연장 1.184㎞ (정거장 1개소), 모란차량기지내 유치선(7편성)

❍ 도 급 비 : 802억원 (1차분 : 158억원)

❍ 공사기간 : ´17.8.23. ~ ´23.8.21. (1차 ´17.8.23. ~ ´18.12.25)

❍ 시공사 및 건설사업관리단 : 쌍용건설(주) / (주)동해종합기술공사

2		물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청

❍ 관련근거

- 물가변동(1회) 적용요청에 따른 검토보고(별내 감1-18-437, 2018.9.12.)

- 제1회 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청(쌍건별내 제2018-318, 2018.9.12.)

- 물가변동(1회) 조정기준일 예정공정 보할 승인(별내 감1-18-436, 2018.9.12.)

❍ 조정내용

- 물가변동 적용 : 지수조정율

- 지수조정률 : 증)3.99%

□지수조정률=〔1.03995205( 비목군 조정계수 합계 - 1) 〕× 100 = 3.99%

- 경과기간 : 135일

□계약체결(‘17.8.18) 이후 90일 경과

- 조정기준일 : 2018. 1. 1

- 물가변동 조정금액                                            (단위 : 원)

계약금액 (A)	물가변동 제외금액 (B)	물가변동 적용대가 (C=A-B)	물가변동 조정금액 (D=C×3.99%)	조정후 금액 (E=A+D)
**************	*************	**************	*************	**************

- 적용 제외금액                                                     (단위 : 원)

예정공정표 금액 *******	기성금액 *******	P.S금액 제외	최종 제외금액 *******
*************	*************	***********	*************

- 예정공정율 산출

□ 물가변동 적용대가 조정기준일이 ‘18.1.1 이므로 착공계 접수시(‘18.7.23)            제출된 예정공정표를 적용하여야 하나, 보할율이 미 기입되어 예정공정표를            기준으로 공사일수 및 금액을 산출하여 **************

⇨ ‘18.9.12 1회 물가변동 조정기준일 예정공정 보할 승인(건설사업관리단)

※ ‘18.5.4 변경 승인된 예정공정표(공정율 0.1%) 적용시 물가변동 조정금액 증가

예정공정표

구 분			수 량	단 가	금 액	산출근거
가설공	현장사무실 등		**	***********	***********	***************
본선 1구간 (907m)	165m	천공	****	*********	***********	*************************** *************************** *************************
		차수	****	*******	***********	*************************** ************************** *************************
	742m	천공	****	*********	***********	*************************** **************************** ************************
		차수	****	*******	**********	***************************** **************************** ************************
	계				***********	*
본선 2구간 (71m)	H파일 천공		***	*********	***********	************************** ************************** ***********************
	지반보강		***	*******	*********	************************** ************************ **********************
	계				***********	*
직접공사비					*************	*
제 경 비					***********	*
계					*************	*********

3		건설사업관리단 검토의견

❍ 물가변동(1회)으로 인한 계약금액 조정 보고서를 검토한 결과,

기준일로부터 90일 경과 및 지수조정율이 3%이상 상승되어 물가변동 요건에 해당되며,

❍ 물가변동 적용대가 및 제외대상 금액(공정률, 기성금, PS금액)이 적정 하게  산정된 것으로 판단되므로 향후 조달청 사전검토 결과를 반영하여 계약금액을 조정함이 타당하다고 사료됨.

4		조 치 계 획

❍ 건설사업관리단의 검토의견이 적정하다고 판단되므로 총사업비 관리지침에    따라 조달청에 사전검토를 요청하고, 향후 검토결과를 반영하여 물가변동으로    인한 계약금액을 조정코자 함.

붙 임 : 1. 물가변동 계약금액조정 요청 공문 및 검토보고서 각 1부.

2. 예정공정표 보할 승인 공문 1부.

3. 물가변동 조정 종합의견서 1부.

4. 물가변동 조정보고서 1부.  끝.