투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	건조시설 설치공사 건설사업관리단 책임 건설사업관리기술자 서윤석
(경유)
제 목	건조시설공사 예정(수정)공정표 제출에 따른 공정관리 철저

1. SCR 추가 관급가재 계약에 따른 건설사업관리용역 무상수행요청 (시설보수과-5250, 2018.9.28.) 및 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사  예정(수정) 공정표 제출 (중랑슬관 2018-387, 2018.9.28. )과 관련입니다.

2. 건설사업관리단에서 `18. 9.28. 제출한 예정(수정)공정표에 따르면 건설공사의 경우 *********************************************되고 있는 실정입니다.

공정이 지연된 이유는 건설사업관리단에서도 잘 알다시피 보일러동 사무실 이전 지연, 소화조 가온으로 인한 보일러 철거지연, 화재사고 및 여름철 폭염 등으로 인한 공사중지 등으로 인한 불가피한 면이 큰 비중을 차지하고 있습니다. 또 그간 건설사업관리단에서도 공정만회를 위해 부단히 노력하였다는 사실 또한 잘 알고 있습니다.

3. 그러나 현재 탈수슬러지를 매립지로 반출이 어려운 상황으로 조속히 해당 공사를 준공해야하는 발주처의 사정을 감안하여 공기가 최대한 단축할 수 있는 방안 (공정만회대책)과  예정공정표를 (재)작성하여 제출하여 주시면 감사하겠습니다.

또 우리센터에서는 공정만회대책 일환으로 붙임 2, 3)의 양식을 작성하여 송부해 드리니 공사추진실적은 붙임2) 양식을 활용하여 매 주간공정회의 시 제출하여 주시고, 일일 공사추진실적은 붙임3) 양식으로 매일 퇴근 전 제출 및 보고하여 주시기 바랍니다.

4. 아울러, 현재 공사비 및 관급자재비 등이 계속 증액되고 있고 다시한번 강조드리지만 공사비가 증액을 최소화 될 수 있도록 관리감독을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. SCR 추가 관급자재 계약에 따른 건설사업관리용역 무상수행 요청 공문  1부.

2. 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사 추진실적 양식  1부.

3. 일일 공사추진실적 및 계획 보고 양식  1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	윤정		주무관	안봉용		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	10/02 이성재
협조자	주무관	양희원		주무관	김석수		주무관	나필수
주무관	안종필		주무관	이석근
시행	시설보수과-5357	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	대시민공개