문서번호	시설관리과-17971
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김재현	이무규	박은선		10/02 代김창년
협 조

『구로구 개봉동 74-44번지 외 1개소』

전기방식공사 설계변경 검토보고

2018. 10.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『구로구 개봉동 74-44번지 외 1개소』

상수도관 전기방식공사 설계변경 검토보고

우리 사업소에서 시행중인 『2018년 상수도관 전기방식공사』와 관련하여 신규공종 추가 및 정산으로 설계변경 사항이 발생하여 검토 후 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ	관련근거

○ 전기방식공사 실정보고에 대한 검토 결과 보고【시설관리과-15467호 (‘18.08.23)】

○ 설계변경에 대한 서류 검토의 건【건기단 *******6호 (‘18.09.18)】

Ⅱ	공사개요

○ 공 사 명 : 2018년 상수도관 전기방식공사

○ 공사기간 : 2018. 05. 16 ~ 10. 12

○ 공사금액 : *********

○ 공사대상

- 구로구 개봉동 74-44번지 부근(상수도관 D:800mm)

- 양천구 신정동 310-10번지 부근(상수도관 D:800mm)

○ 공사규모 : 정류기 2개소, 양극홀 4개소, 전기배선공사 1식

○ 계 약 자 : *************************************

Ⅲ	설계변경

○ 설계변경 사유

- 신규공종 발생에 따른 계약금액 변경

- 건강보험료 등 미집행 보험료(제경비) 정산

○ 설계변경 내용

- 계약기간 : 변경없음

- 계약금액

구 분	당 초	변 경	증 · 감	비 고
*****	***********	***********	*********

- 주요공정 물량 변경 내역(신규)

연번	구 분	사 유	수 량			비 고
			변경전	변경후	증감
1	강관 기계 전주	한전 AC220V 인입용	0	1	증)1
2	저항박스 (RESISTANCE BOX)	도시가스 배관과 전기방식 간섭 발생	0	1	증)1
3	측정용 LEAD CABLE (F-CV-600V 1C-10㎟)	RESISTANCE BOX 부속	0	26	증)26
4	측정용 LEAD CABLE (F-CV-600V 1C-25㎟)	〃	0	26	증)26
5	CAD WELD (CA-15 TYPE)	〃	0	2	증)2
6	CAD WELD (CA-25 TYPE)	〃	0	2	증)2

Ⅳ	조치계획

○ 위와 같이 공사시행 중 발생한 신규공종 및 제경비 정산에 따른 설계변경 사항에 대하여 설계변경심의소위원회를 개최하고자 하며,

○ 심의결과를 반영하여 설계변경 계약하고자 함.

붙 임 : 1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 설계변경내역서 제출 공문(감리) 1부.  끝.