문서번호	자원순환과-16009
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
이완표		황오주	10/02 박동규
협조

노원자원회수시설 관리동 내진성능 개선 및

소각재저장조 기둥 보수공사 계획

2018. 10.

노원자원회수시설 관리동 내진성능 개선 및

소각재 저장조 기둥 보수공사 계획

관리동 내진성능평가 용역 결과에 따른 관리동 내진성능 개선 및 국가 안전대진단 결과에 따른 소각재저장조 기둥을 보수하고자 함.

Ⅰ		사 업 개 요

❍ 추진근거

- 노원자원회수시설 위·수탁운영 협약서 제11조(위탁운영비용 집행)

- 노원자원회수시설 운영사 교체공사 요청(우주노원 18-240호, ’18.9.21.)

❍ 추진배경

- 2017년 8월『관리동 내진성능평가 용역』결과

· 16개소 일부 거더와 4개소의 기초에 대한 내진보강 필요.

- 2018년 상반기 국가안전대진단 결과

· 소각재저장조 좌측기둥 손상으로 단면복구 필요.

❍ 시설개요

(관리동)

층    수 : 지하 1층, 지상 3층

구조형식 : RC(Reinforced Concrete, 철근콘크리트)

건물높이 : 17.06m

건축면적 : 1,401.3㎡

연 면 적 : 6,618.7㎡

(소각재저장조)

위    치 : 공장동

면    적 : 468㎡ (W8,000×L58,500㎜, FL.-12,000~FL.+20,000)

구조형식 : RC(Reinforced Concrete, 철근콘크리트)

공장동 관리동 정비동 굴뚝
건물 배치도	소각재저장조

Ⅱ		공 사 계 획

❍ 공사개요

- 사 업 명 : 노원자원회수시설 관리동 내진성능 개선 및 소각재저장조

기둥 보수공사

**********************

- 사업기간 : ’18. 10월 ~ ’18. 12월(기둥보수공사는 소정비 기간 내)

- 사업예산 : 민간위탁금(정산비) 지출

- 사업내용

·  관리동 내진성능 개선 : 16개소 거더(바잘트 섬유시트 보강법)와

4개소 기초(나선형강관 파일 보강공법) 보강

·  소각재저장조 보수 : 9개소 기둥(철판 보강공법) 보수

❍ 공사원가 검토결과

*************************

*******************************************

· 일위대가 조정 : 특별인부 및 도장공 할감(10% ~ 50%)

Ⅲ		향 후 계 획

❍  입찰공고(조달청 G2B) 및 계약 : ’18. 10월

❍  관리동 내진성능 보강 :  ’18. 10월 ~ 12월.

❍  소각재저장조 기둥보수 :  ’18. 11월(소정비 기간내).

붙임 : 1) 주요심사내역 1부.

2) 공사원가 심사내역서 1부.  끝.