문서번호	설비부-13498
결재일자	2018.10.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장
김현욱	유병기	10/02 권오식

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사(총차, 1차)』

준공기한 연기 검토 보고

2018. 10.

도시기반시설본부

[설 비 부]

『남부도로사업소 청사 신축 통신공사(총차, 1차)』

준공기한 연기 검토 보고

「남부도로사업소 청사 신축 통신공사(총차, 1차)」준공기한을 선행 공정(건축공사)에 맞게 연장하여 공사추진에 만전을 기하고자 합니다.

Ⅰ		관 련 근 거

삼우(도시기반) 제18-0928-2호(2018.09.28.), 계약기간 변경 검토 보고

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』

공사위치 : 서울시 금천구 시흥3동 963-1 외 13필지

공사기간 : 총차 `17.11.03. ~ `19.05.02(1차 `17.11.03. ~ `18.11.30.)

공사규모 : 지하1층/지상5층(연면적 5,361㎡)

공사내용 : 옥외통신공사, 통합배선공사, CATV 및 CCTV설치공사

방송설비, 비상벨, 출입통제, 통합모니터링 공사 등

도 급 비 : (총차) 493백만원, (1차) 45백만원

시 공 사 : ㈜엔트립 대표 최종국

감 리 사 : ㈜삼우공간건축사사무소 외 1개사

[위 치 도]	[조 감 도]

Ⅲ		검토내용

준공기한 연장 사유

□ 건축공사 변경 계약으로 인한 준공기한 연장

준공기한 연장 내용

구 분	차 수	당 초	변 경	비고
계약기간	(총차)	2017.11.03. ~ 2019.05.02.	2017.11.03. ~ 2019.07.31.	증 90일
	(1차)	2017.11.03. ~ 2018.11.30.	2017.11.03. ~ 2018.12.31.	증 31일
계약금액	(총차)	492,710,120원	492,710,120원	변동없음
	(1차)	45,000,000원	45,000,000원

감리단 검토의견

□ 남부도로사업소 청사 신축 통신공사(1차, 총차) 계약기간 변경 요청을 검토한 결과 통신공사 업체에서 요청한 통신공사(1차, 총차) 계약기간 변경은 적합한 것으로 사료됨.

Ⅳ		검토의견

책임 건설사업관리기술자 검토 의견과 같이 통신공사(총차, 1차) 준공기간을       연기하여 총무부에 변경계약을 의뢰하고자 함.

지체상금 부과 : 미부과.

붙임  감리단 공문 1부.  끝.