내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	용역 준공기한 연기 의뢰

1. 생활환경과-12800(2018.10.02)호와 관련된 내용입니다.

2. 우리부서에서 시행 중인 「서남음폐수 바이오가스화시설 기본계획 수립 용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서남음폐수 바이오가스화시설 기본계획 수립 용역

나. 계 약 자 : 주식회사 이산(대표자 이원찬)

다. 계약금액 : 금16,000,000원(금일천육백만원)

라. 용역기간

- 당    초 : 2018.07.09. ~ 2018.10.06.

- 변    경 : 2018.07.09. ~ 2018.12.14.

마. 귀책소재 : 서울특별시(지체상금 미부과)

바. 연기사유 : [붙임2] 용역 준공기한 연기 의뢰서 참조

붙임1. 준공기한 연기 검토 보고(방침) 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부  끝.

	생활환경과장
주무관	안종인		음식폐기물관리팀장	한성현		생활환경과장	10/02 구본상
협조자
시행	생활환경과-12839	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화		/전송	02-2133-1027	/		/	부분공개(5)