＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	서부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	용역 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 (서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부 등) 보수보강공사 실시설계 용역

1. 우리사업소에서 시행중에 있는 “서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부 등) 보수보강공사 실시설계 용역” 건에 대하여 아래와 같이 변경계약(준공기한연기) 처리하고자 합니다.

가. 용 역 명: 서부수도사업소 비탈면(팔각정 하부 등) 보수보강공사 실시설계 용역

나. 계약업체: 주식회사 이엔지건설엔지니어렁 대표 ***

다. 계약금액: 금3,362,810원

라. 준공기한연기

- 당초: 2018. 10. 10.

- 변경: 2018. 10. 26.

마. 귀책사유: 발주청(서부수도사업소)

바. 지체상금 부과여부: 미부과

사. 연기사유: 절대공기 부족

붙임  1. 검토보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

★주무관	방만천		행정관리팀장	김광석		행정지원과장	10/02 서경만
협조자	주무관	구준모
시행	행정지원과-24339	(		)	접수		(		)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)	/
전화	02)3146-3519	/전송	02)3146-3578	/	pico1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)