문서번호	교량안전과-17318
결재일자	2018.10.4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정성민		손창익	10/04 김종호
협조	강남일반교량팀장		이홍재
	기술점검팀장		박영권

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경 자문회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

교량안전과

(강북일반교량팀)

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경 자문회의 결과보고

본 공사와 관련 설계변경 사유의 타당성, 물량변경 및 적용단가의 적정성 등을  검토하고자 설계변경 자문회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림.

관련 근거

❍ 교량안전과-17076호(2018.10.1.) 설계변경 자문회의 계획

공사 개요

❍ 공 사 명 : 응봉교 교량점검시설 등 설치공사

❍ 공사기간 : 2018. 6.11 ~ 2018.10. 8

❍ 공사내용 : 종방향 점검로 설치 463m, 조류방지망 설치 500㎡

❍ 총공사비 : 566,756천원 (도급비 565,215천원 이전비 1,541천원)

❍ 시공/감리 : 원세건설(주) / (주)유신 외 1개사

설계변경 자문회의 결과

❍ 일    시 : 2018.10. 2.(화) 10:30 ~ 11:00

❍ 장    소 : 교량안전과 회의실

❍ 위원구성

- 위원장 : ************************

- 위  원

․ 내부(3) : **************************

․ 외부(1) : ***************************

❍ 자문결과 : 원안가결

- 민원사항에 따른 물량 증가 및 제경비 정산에 따른 설계변경건으로 공사계약일반조건 등 관련규정에 따라 적정함.

❍ 수량 변경내역

공종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증(감)
조류방지망 설치	㎡	500	1,605	1,105	주간
종방향 점검시설	m	463	463	-	주간
교통정리원	인	-	13	13	보통인부

❍ 공사비 증감내역

구 분	공 사 비(단위 : 천원)			비 고
	당 초	변 경	증(감)
총공사비	566,756	654,940	88,184
도 급 비	565,215	654,940	89,725
이 전 비	1,541	-	(1,541)

조치계획

❍ 자문결과 및 계약금액(제비율)검증 확인결과에 따라 설계변경 시행

붙임 1. 설계변경 자문회의 결과 1부.

2. 계약금액(제비율)검증확인서 1부.  끝.