투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	준공기한 연기 의뢰(남부도로사업소 청사 신축 통신공사)

1. 설비부-13498(2018.10.02.)호와 관련입니다.

2.『남부도로사업소 청사 신축 통신공사』에 대하여 아래와 같이 준공기한(총차 및 1차)     연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 의뢰 내용

구 분	차 수	당 초	변 경	비고
계약기간	(총차)	2017.11.03. ~ 2019.05.02.	2017.11.03. ~ 2019.07.31.	계약금액 변동없음
	(1차)	2017.11.03. ~ 2018.11.30.	2017.11.03. ~ 2018.12.31.

나. 귀책소재 및 연기사유

1) 연기에 따른 귀책소재 : 서울시 도시기반시설본부

2) 지체상금 부과여부 : 미부과
3) 연기사유 :  건축공사 계약 변경에 따른 준공기한 연장

붙임  1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기 의뢰서 및 합의각서(총차 및 1차) 1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		열빛총괄과장	유병기		설비부장	10/04 권오식
협조자	경리과장	이현숙
시행	설비부-13565	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)