문서번호	시설과-2328
결재일자	2018.10.5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	시설과장		서부공원녹지사업소장
최현주	이용원	문인기		10/05 오진완
협 조

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청(2회) 검토보고

2018. 10.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『금천 박미사랑공원 조성공사』

실정에 대한 승인요청 검토보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

『금천 박미사랑공원 조성공사』의 감독기관인 서울시설공단의 공사 진행 중 실정사항 승인요청(2회)에 대해 아래와 같이 검토 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 금천 박미사랑공원 조성공사

○ 공사기간 : 2018. 7. 2. ~ 10. 29.

○ 사업내용 : 토공, 우상수공, 포장공, 정자 등 시설물 17종 설치, 수목 식재 등 공원조성

○ 도 급 액 : 금438,956,900원(관급자재비 별도)

○ 도 급 자(주계약자 공동도급방식)

- 주계약자 : 큰빛종합건설(주) 대표 김현철

- 부계약자 : 세인조경(주) 대표 이현룡

○ 감 독 청 : 서울시설공단 공사감독 3처

Ⅱ		실정보고 검토내용

○ 관련근거 : 서울시설공단 공사감독3처-9832호(2018.10.2.)

○ 실정 보고사항

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
토공	▸사토반출 차량 및 운반거리가 덤프15톤, 거리 10㎞로 설계되었으나 현장부근에 사토장이 없어 처리 곤란	▸사토반출을 현황에 맞게 조정 - 사토장 지정 : 인천시 연수구 송도동 인천신항만 배후단지(1단계) 1공구 현장 10 → 33.76㎞ - 운반차량 : 덤프 15 → 24톤

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
토공	▸옹벽구간 되메우기 및 다짐 토량부족으로 지반 정지 토공물량 조정 불가피	▸부족한 옹벽구간 되메우기 및 다짐 토량은 지반정지 토공의 유용무대 토량으로 조정시행 - 유용무대(토사) 697 → 535.15㎥ (감된 161.85㎥는 시설물 토공에서 되메우기 및 다짐으로 사용)
우배수	▸원형우수 맨홀이 현장타설로 설계되어 있으나 공정 및 품질확보 곤란 ▸진입로 상부 표면 배수처리 시설 미흡	▸원형우수맨홀 기성품으로 변경 - 우수맨홀(D900, 현장타설) 2 → 0개소 - 우수맨홀A(D900, 기성품) 0 → 2개소 ▸진입로 상부 표면 배수처리시설 추가 - 벤치플륨관(D200) 37.5 → 88m(증 50.5m)
포장	▸도로 옆(옹벽 밑) 경계석 설치구간이 실측결과 도로부지로 옹벽과 맞닿아 있어 경계석 설치 불필요 (녹지공간 조성 불가) ▸산책로 흙콘크리트포장 경계엣지 설치시 동절기 융기현상으로 이탈 예상	▸도로 옆(옹벽 밑)부분 녹지경계석 시공 제외 - 녹지경계석(150*150, 직선) 56 → 19m (감 37m) - 녹지경계석(150*150, 곡선) 27 → 26m (감 1m) ▸산책로 흙콘크리트포장 경계엣지 시공에서 제외 및 조정 - 황토포장 엣지 211.5m → 0 - 거푸집설치 0 → 21.15㎡
시설물	▸도기본 부지경계 안전휀스A 시공 제외(관목차폐) 및 공원북측 옹벽구간 안전휀스 추가 설치, 공원 입구좌측 조경석 쌓기구간 안전휀스 필요	▸안전휀스A를 일부 공원입구에 배치하고 공원북측 옹벽구간은 안전휀스B 추가 - 안전휀스A(W1600*H1200) 37경간 → 13경간(감 24경간) - 안전휀스B(W1600*H1200) 46경간 → 45경간(감 1경간) ⇒ 실정검토사항 보완 : 안전사고 예방을 위해 도로부지경계 안전휀스A는 원설계대로 유지

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
시설물	▸계단A와 계단B가 현장과 상이하여 데크계단으로 진입토록 조정(발주청 요청)	▸계단A를 데크계단으로 일부 공종 조정하고 계단B는 제외 - 계단A 1 → 계단A-1 1개소 - 계단B 1 → 0 - 데크계단(W200) 0 → 1식 - 데크난간(W1070*H1250) 0 → 23경간 ⇒ 실정검토사항 보완 : 데크난간은 공원경관의 통일성을 위해 원설계상의 안전휀스B 설치로 변경
	▸조경석쌓기 물량증가 - 기존 조경석쌓기 구간 직선화 및 길이 연장 - 공원입구 좌측 단차로 인한 조경석쌓기 시공 - 조경석쌓기 하부 안전 위한 기초보완 시공 (발주청 요청)	▸조경석쌓기를 현장에 맞게 물량증가 반영하고 기초부를 보완하여 시공 - 조경석쌓기(500*600*700) 125.84톤(전석쌓기품) - 조경석쌓기A(500*600*700) 0 → 97.79톤(유용석쌓기품) - 조경석쌓기 기초부 보완 ·기초레미콘타설 0 → 13.8㎥ ·합판거푸집 0 → 10.68㎡ ·앵카 및 철근연결 고정(뒷면 조경석 하단) 0 → 50개소
	▸옹벽구간 터파기 설계누락 및 조경석쌓기 구간 기초터파기 토공량 증가 ▸공원입구 우측옹벽 통행 저촉 및 왼쪽 기존옹벽 또한 단절되어 공원입구 경관 훼손	▸설계 누락된 옹벽터파기 및 추가된 조경석 터파기 등을 내역에 반영하고, 옹벽은 현장 여건에 맞게 구간 및 물량조정 - 터파기/육상(백호 0.7) 29.89 → 330.79㎥ - 잔토처리(백호 0.7) 16.53 → 19.87㎥ - 되메우기 및 다짐(굴삭기 0.7) 13.36 → 472.77㎥ (되메우기 부족한 161.85㎥는 토공 유용무대 토량으로 사용)

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
식재	▸식재사항 현장과 상이 - 서울시 도기본 도로경계 공간부지 식재곤란 - 현장여건상 연암지반이 많아식재공종 및 수종, 수량, 위치 등 조정 필요 - 옹벽하부 도로와 맞닿은 구간 식생 공간 조성 불가 - 금천구 요청수목 반영 (경관향상을 위한 붉은 매자나무, 홍단풍 반영)	▸식재를 현장에 맞게 조정 시행 (공원상단 법면은 연암으로 수목 생장이 어려워 녹생토로 시공 반영) - 소나무(조형, H 5.0*R 30) 6 → 0주 - 소나무(조형, H 4.0*R 20) 13 → 0주 - 소나무(R20) 4 → 20주 - 소나무(R15) 4 → 0주 - 소나무(R10) 16 → 0주 - 갈참나무(R10) 5 → 0주 - 굴참나무(R10) 5 → 0주 - 배롱나무(R 10) 12 → 6주 - 복자기(R 10) 7 → 15주 - 산딸나무(R 10) 5 → 10주 - 상수리나무(R16) 10 → 0주 - 신갈나무(R8) 5 → 3주 - 졸참나무(R8) 8 → 3주 - 왕벚나무(B12) 28 → 20주 - 홍단풍(R10) 0 → 5주 - 화살나무(H0.6) 1,810 → 1,500주 - 매자나무(H0.5) 0 → 500주 - 담쟁이 145 → 0본 - 능소화 160 본 → 0본 - 줄사철 150본 → 0본 - 잔디 1,742.3 → 1,000㎡ - 녹생토 0 → 850㎡ ⇒ 실정검토사항 보완 : 소나무 규격 R15~30으로 다양하게 조정
폐기물 운반 및 처리	▸토공작업 중 지반 저부 폐기물수량 증가	▸증가된 물량으로 조정 - 폐기물운반 40㎥(1회승인) - 폐기물처리 50톤(1회승인) 50 → 54.4톤(증 4.4톤) (혼합 40*1.36) 0 → 54.4톤

구 분	현황 및 문제점	검 토 결 과	비고
관급자재	▸상기내용으로 관급자재 변경	▸관급자재 물량 조정 - 레미콘(21-12) 13 → 24㎥ - 레미콘(18-8) 8 → 0.15㎥ - 이형철근(D13㎜) 0.38 → 0.03톤 - 이형철근(D16㎜) 0.04 → 0톤 - 녹지경계석(150*150, 직선) 58 → 19m(감 39m) - 녹지경계석(150*150, 곡선) 28 → 27m(감 1m) - 안전휀스(1600*H1200) 83 → 58경간(감 23경간) ⇒ 안전휀스 검토사항 추가반영 필요

Ⅲ		변경금액(개략공사비)

구 분		금 액(단위:천원)				비 고
		당 초	전회(1회)	변경(2회)	증 감
총공사비		572,140	577,192	552,863	-19,277
도급비	공급가액	399,052	403,645	394,860	-4,192
	부 가 세	39,905	40,364	39,486	-419
	도급비계	438,957	444,009	434,346	-4,611
관 급 비		130,210	130,210	115,544	-14,666
상수도인입비		2,973	2,973	2,973	0

※ 개략공사비로 실정보고 추가 검토사항 및 현장상황에 따른 경미한 변경은 설계변경시 반영예정

Ⅳ		검 토 의 견

○ 위 실정보고 사항 및 보완사항에 대하여 시행토록 승인 처리하고 향후 준공 전 설계변경 시행코자 함.

붙 임 : 실정사항 승인요청 관련 공문 1식.  끝.