내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기요청(탄천1교 보수공사)

1. 교량안전과-16218호(2018.9.13.)와 관련입니다.

2. 우리 과에서 시행중인 “탄천1교 보수공사”에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 준공기한 연기 내역

용 역 명	도 급 자	용역기간
		당 초	변 경
탄천1교 보수공사	㈜비엘건설	‘18.04.11∼‘18.10.07	‘18.04.11∼‘18.10.26

나. 지체상금 : 미부과

다. 연기사유 : 세부 사유 별도 연기의뢰서 붙임

라. 예산과목 : 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비(사고이월)

붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	교량안전과장
주무관	정동익		교량관리팀장	유제천		교량안전과장	10/05 김종호
협조자
시행	교량안전과-17424	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1958	/전송	02-2133-1429	/	seestar7@seoul.go.kr	/	부분공개(5)