투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	관리과장
(경유)
제목	슬러지이송 컨베이어(벨트 및 스큐류식) 제작설치 건 계약변경 요청

1. 중랑물재생센터 슬러지건조시설 설치공사 관급자재 ‘슬러지이송 컨베이어’ 설계 및 계약변경 계획 (시설보수과-5372, `18.10.4.)과 관련입니다.

2. 아래의 서울지방조달청 계약 건에 대하여 해당공사 현장여건 변화 (설계 오류 및 누락)로 계약변경을 요청하니 조속히 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 슬러지이송 컨베이어 (벨트 및 스크류식) 제작설치

나. 계약상대자 : 주성테크 (대전 대덕구 벚꽃길 101, 대표: 이성주)

다. 계약일자 : ******************************

라. 계약금액 : ************

마. 납품기한: `19. 1. 31.

바. 하자기한 : 준공일 (물품검수일자 기준) 로부터 3년간

사. 납품장소 : 서울 중랑물재생센터 내 슬러지건조시설 설치공사 현장

아. 예산과목 : [물재생시설과_재배정] / 자본적지출 / 비가동설비자산취득 / 건설중인자산 / 시설비및부대비 /시설비

자. 변경사유: 수요기관의 공사현장 여건변화 ************

차. 변경금액

(단위: 원)

구 분	당초 계약금액	변경 계약금액	증·감내용
① 물품 제조구매비	402,649,950	***********	*************
② 조달수수료	3,201,630	*********	***********
계 (①+②)	405,851,580	***********	*************

붙임  1. 건설사업관리단 변경계약 요청 검토 보고서  1부.

2. 변경설계변경내역서, 견적서, 변경시방서, 변경도면 각 1부.

3. 계약상대자 합의각서 및 최초 계약내용 각 1부

4. 설계변경 및 계약변경 방침서  1부.  끝.

	시설보수과장
★주무관	윤정		주무관	안봉용		시설보수과장	전결 10/05 윤승범
협조자
시행	시설보수과-5392	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동) 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2564	/전송	02-2211-2579	/		/	부분공개(5)