문서번호	교량안전과-17449
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
정성민		손창익	10/08 代박동욱
협조

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경(1회, 정산) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

교량안전과

(강북일반교량팀)

- 응봉교 교량점검시설 등 설치공사 -

설계변경(1회, 정산) 검토보고

본 공사와 관련 건설사업관리단으로부터 설계변경 검토의견서가 제출되어 내용을 검토하고 그 결과를 보고 드림.

관련 근거

❍ 감리18-995호(‘18.10.1.) 설계변경 검토의견서 제출

공사 개요

❍ 공 사 명 : 응봉교 교량점검시설 등 설치공사

❍ 공사기간 : 2018. 6.11 ~ 2018.10. 8

❍ 공사내용 : 종방향 점검로 설치 463m, 조류방지망 설치 500㎡

❍ 총공사비 : 566,756천원 (도급비 565,215천원 이전비 1,541천원)

❍ 시공/감리 : 원세건설(주) / (주)유신 외 1개사

검토내용

❍ 설계변경 근거

- 교량안전과-16904호(‘18. 9.28.) : 실정보고에 대한 검토보고

❍ 설계변경 사유 및 물량 증․감내역

- 민원사항에 따른 조류방지망 추가설치

- 기타 제경비 정산 등

공종	단위	수 량			비 고
		당 초	변 경	증(감)
조류방지망 설치	㎡	500	1,605	1,105
종방향 점검시설	m	463	463	-
교통정리원	인	-	13	13

❍ 공사비 증․감 내역

구 분	공 사 비(단위 : 천원)			비 고
	당 초	변 경	증(감)
총공사비	566,756	651,970	85,214
도 급 비	565,215	651,970	86,755
이 전 비	1,541	-	(1,541)

※ 계약금액(제비율)조정 검증 결과 이상없음(붙임5 참조)

검토의견 및 조치계획

❍ 건설사업관리단으로부터 제출된 설계변경 실정보고에 대하여 검토한 바 타당한 것으로 판단되며, 또한 설계변경 자문회의 결과 적정한 것으로 의견이 제시됨

⇒ 상기내용과 같이 설계변경(정산) 시행조치

붙임 1. 실정보고에 따른 검토보고 1부.

2. 건설사업관리단 설계변경 검토의견서 1부.

3. 설계변경 자문회의 결과보고 1부.

4. 설계변경내역서 1부.

5. 계약금액(제비율) 조정 검증확인서 1부.  끝.