문서번호	건축부-14173
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	건축관리과장	건축부장
남광연	차무흥	10/08 임인구
협 조

『스페이스살림 조성공사』

관급자재(덱플레이트) 실정보고 검토 및 자재발주 계획보고

2018. 10.

도시기반시설본부

( 건 축 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『스페이스살림 조성공사』

관급자재(덱플레이트) 실정보고 검토 및 자재발주 계획보고

『스페이스 살림 조성공사』와 관련하여 “관급자재 (덱플레이트) 수량 및 규격변경 실정보고”를 검토하고 자재구매 발주계획을 보고함

1		공 사 개 요

공사기간 : 2017.12.26. ~ 2020.6.25

공 사 비 : 17,862 백만원

시공사/감리자 : ㈜호반건설 외 2개사 / ㈜희림종합건축사사무소 외 1개사

현 공 정 : 지하터파기 및 토사반출(공정률 : 20%)

2		실정보고 내용

관련근거

‒ HTSC 1809-26 (‘18. 9. 19.) : 덱플레이트 실정보고 및 구매요청

‒ 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)

실정보고 사유

‒ 덱플레이트 설계 물량 조정 ※ 시공사 및 설계사 수량 확인 완료

· 설계도면과 설계내역서 수량이 상이하여 설계도면을 기준으로 실수량 산출하여 발주

**************************************************************

************************************************************************************************************************************************************************************

********************************************

변경 내용

‒ 관급 자재 ************************

구 분		당초수량	변경수량	금 액 (원)	평균단가(원/㎡)	비 고
변경전	********** ****	******		***********	******	********
변경후	********** ****		*****	***********	******
	********** *********		*****	***********	******
	*********	******	******	***********

******************************************

‒ 도급공사비 *************************

· 덱플레이트 수량 감소*********에 따른 설치비 감소

· **********************************************

※ 사업비 검토                                            (단위:  원 )

구 분	당초	변경	증감	비고
직접공사비	***********	***********	************
간접공사비	**********	**********	***********
부가세	**********	**********	***********
도급공사비	***********	***********	************
관급자재비	***********	***********	**********	********
사업비	***********	***********	************

*************************************************

3		관급자재 발주계획

구매방법

‒ ************************

‒ *******************************

관련규정

‒ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 1항 6호 라5목

‒ 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령 제2조의2(중소기업자와의 우선조달계약) 1항 2목

납품방법

‒ 납품장소 차상도(*******) 및 납품장소 하차도(**************)

예산과목

‒ 여성가족정책실 여성정책담당관, 양성평등 및 여성복지증진, 여성경제력 강화, 스페이스 살림 건립 추진, 시설비.

4		건설사업관리자 검토의견

관급자재(덱플레이트) 재질 변경 및 자재 발주요청서 검토 결과, 산출수량 및 적용단가 등이 적정하다고 판단되어, 덱플레이트 규격을 변경하여 자재 발주 요청함.

단열재 타설부착 도급공사비 관련, 추후 현장여건 확인후 실시공 물량 확정후 추가 실정보고 예정임.

5		처리의견

건설사업관리자의 검토의견에 따라 관급자재(덱플레이트) 수량 및 재질을 변경하여 자재발주 및 구매를 시행하고, 도급공사비 변경은 향후 설계변경 심의위원회에서 정확한 금액을 결정토록 조치하고자 함.

붙임 : 덱플레이트 실정보고 및 자재 발주 요청공문(건설사업관리단) 1부.  끝.