문서번호	설비부-13754
결재일자	2018.10.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
전성완	여인웅	전결 10/08 권오식
협 조

천호대로(광나루역) 확장 전기공사

설계변경(총차7회, 7차3회) 검토 보고

2018. 10.

도시기반시설본부

( 설   비   부 )

천호대로(광나루역) 확장 전기공사

설계변경(총차7회, 7차3회) 검토 보고

우리 본부에서 시행중인 “천호대로(광나루역) 확장 전기공사”에  대하여 건설사업관리기술단으로부터 설계변경 자문회의 결과 등을   반영한 설계변경 요청이 있어 이에 대한 검토보고임

1		관 련 근 거

○ 공사 설계변경도서 제출(전체7회 및 7차3회 변경)

(수성제2018-3000호, 2018.10.05.)

○ 설계변경 자문회의(소위원회) 지적사항 조치결과

(천호수 제2018-493호, 2018.09.17.)

2		공 사 개 요

○ 공 사 명: 천호대로(광나루역) 확장 전기공사

○ 위    치: 광진구 구의동 58-15 ~ 광장동 388-10(아차산역~광나루역)

○ 공사기간: 2011. 6. 16. ~ 2018. 12. 20.

(7차: 2017. 9. 5. ~ 2018. 12. 20.)

○ 공사내용

- 수전전력 500kW, 지하차도 등기구 996개, 가로등주 80본 신설

- 지하보도 조명 및 환기설비, 경보설비 공사

- 지하차도 상부 조명, 수경시설, CCTV 설치 공사

- 상징조형물 경관조명 설치 공사

○ 도 급 비: 1,399,255천원(7차 682,175천원)

○ 공 정 률: 98.37%

○ 시 공 사: ㈜거성전설 대표 공병준

○ 감 리 사: ㈜수성엔지니어링 대표 박미례

3		추 진 경 위

○ ‘11. 6. 16 : 공사계약 및 착공

○ ‘17. 9.  4 ~ 9. 5 : 7차 공사 계약 및 착공

○ ‘18. 5. 11 : 실정보고(수배전반 및 수경설비 변경사항) 승인 통보

○ ‘18. 5. 14 : 실정보고(CCTV 및 비상벨 변경공사) 승인 통보

○ ‘18. 6. 19 : 실정보고(CCTV 및 비상벨공사 변경) 승인 통보

○ ‘18. 6. 25 : 업무지시(좋은빛 심의결과 반영 지시)

○ ‘18. 7. 12 : 실정보고(상징조형물 설치) 승인 통보

○ ‘18. 7. 31 : 설계변경 자문 소위원회 개최

4		설계변경 검토내용

○ 설계변경 사유: 설계변경 자문 소위원회 결과 반영

○ 주요 물량변경 내역

공 종	규 격	단위	당 초	변 경	증 감
기류휀제어반	큐비클 내장형	식	*	*	***
강제전선관	아연도 36C	m	***	*	*****
전력케이블	F-CV 4sq 2C	m	*	***	*****
UTP 케이블	CAT.6 0.5mm 4P	m	*	***	*****
컬럼스피커	20W 옥외용	개	*	*	***

○ 공사비 변경 내역

(단위 : 천원)

구 분	전체(총차7회)			금회(7차3회)
	당 초	변 경	증 감	당 초	변 경	증 감
직접공사비	*******	*******	*******	*******	*******	*******
간접공사비	*******	*******	******	*******	*******	******
물가변동 조정금액	*******	*******	*	*******	*******	*
공급가액	*********	*********	*******	*******	*******	*******
부가가치세	*******	*******	******	******	******	******
도급비	*********	*********	*******	*******	*******	*******

○ 공사기간 변경 현황 : 변경없음

○ 건설사업관리기술단 검토 의견

- 변경 물량에 대한 수량산출 및 단가적용과 공사비 반영이 적정하고

- 전체 공정계획의 변경으로 인한 지하차도 상부 경관개선을 반영한         7차 공사에 대한 금액조정 검토 결과 원활한 후속공사 추진을 위하여        적정한 것으로 사료됨

5		검 토 결 과

○ 건설사업관리기술단의 설계변경(총차7회, 7차3회) 요청사항을 검토한       결과 설계변경 계약요청 내용이 적정한 것으로 판단되어 총무부에         변경계약을 의뢰코자 함

붙임  1. 건설사업관리기술단 공문 1부.

2. 변경도서(별첨) 1부.  끝.