문서번호	기술심사담당관-15395
결재일자	2018.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호	행정2부시장 방침 제211호

				시 민
주무관	기술지원팀장	기술심사담당관		행정2부시장
윤갑진	류용열	김홍길		10/08 진희선
협 조
	기술관리팀장		이상석
	토목심사팀장		조임남
	건축심사팀장		도태환

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(9월)

2018. 10.

기술심사담당관

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	외부전문가 주관 점검실시
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

건설공사장 외부전문가 기동점검단 활동결과 보고(9월)

우리시 주요 공사현장을 대상으로 실시하고 있는「외부전문가 기동점검단」의 ’18년 9월 중 활동결과에 대하여 보고 드림

□ 점검개요

점검일자	’18. 9. 4.(화)	’18. 9. 18.(화)	’18. 9. 20.(목)
공 사 명	성산대교 북단 성능개선공사	망우3동 주택가 공동주차장 건설공사	서울제물포터널 민간투자사업(2공구)
사업부서	도시기반시설본부 (토목부)	중랑구청 (디자인건축과)	도시기반시설본부 (방재시설부)
공사기간 (공정률)	’17.3. ~ ’19.12. (44%)	’17.12. ~ ’18.12. (41%)	’15.10. ~ ’20.10. (45%)
점 검 자	· 건화 이상환 · 이원이엔지 오세준 · 진우엔지니어링 안삼현 (내부 : 기술관리팀 2)	· 승구조기술사사무소 김현아 · 태민엔지니어링 이종태 · 희림종합건축사사무소 장용운 (내부 : 건축심사팀 3)	· 서현기술단 김승철 · 한국종합기술 원종진 · ㈜흥원건설 김영섭 (내부 : 토목심사팀 3)

□ 중점 점검사항

❍ 현장대리인, 책임감리원 등 근무실태

- One-PMIS에 작업일보 작성 및 현장내 장비, 인력 투입현황 관리 여부

- 현장반입 건설기계임대차 계약서 작성, 대여대금 지급보증서 교부 여부 확인

- 현장대리인 및 참여기술자(감리원) 현장근무 여부 확인 등

❍ 토공 및 가시설 설치상태 등 안전관리 실태

- 동바리, 비계 설치 및 유지관리 실태 점검

- 터널, 개착구간 등의 가시설 시공 및 유지관리 실태 점검

❍ 구조물에 대한 품질․공정관리 등 시공관리

- 시공 상세도 등 설계도면 작성상태 및 시공계획 수립 여부

- 구조물 시공 및 품질관리 상태 점검

□ 점검결과

❍ 총 지적사항

공 사 명	계	안전관리	품질관리	기 타
계	28	21	5	2
성산대교 북단 성능개선공사	9	8	0	1
망우3동 주택가 공동주차장 건설공사	13	7	5	1
서울제물포터널 민간투자사업(2공구)	6	6	0	0

□ 분야별 주요 지적사항

안전관리 분야

❍ 강변북로에 설치된 기초부 가시설 모서리부에서 차량 충돌사고가 우려되므로 안전시설 조치 필요[성산대교 북단 성능개선공사]

⇒ 강변북로 통행 차량 및 가교 안전성 확보를 위한 안전시설 등 조치

❍ 가교 보도부 난간의 추락 및 낙하물 방지시설 보완 시공 필요[성산대교 북단 성능개선공사]

⇒ 가교 보도부 난간 높이 조정 및 안전망 설치 등 안전시설 보완

❍ 자유로 중분대(기존 성토 노상부) 직접기초에 대한 면밀한 지지력 및
침하량 검토 필요[성산대교 북단 성능개선공사]

⇒ 지지력(허용) 검토 및 장기 공용 침하량을 추가 검토하여 가교 안전성 확보

❍ 복공판 단차부 안전사고 방지를 위한 평탄성 확보 보완시공 필요[성산대교 북단 성능개선공사]

⇒ 복공판 단차 발생구간 보완 조치를 통해 차량주행 안전성 확보

❍ 레이커로 인해 발생한 구조체 결손부분(지하외벽, 계단 등) 구조 검토
및 보수공사 요망[망우3동 주택가 공동주차장 건설공사]

⇒ 구조 검토 및 철근배근 확인 후 보강 방안 검토(부분 치핑 후 보수몰탈
(폴리머 몰탈)로 보수하고 필요시 방수공사 실시)

❍ 대지 경계부분 가설 벽체의 버팀대(경사방향) 미설치[망우3동 주택가 공동주차장 건설공사]

⇒ 가설 벽체의 전도가 우려되므로 버팀대 보강 요망

❍ 본선 터널 구간 차량용 리프트 안전성 검토 요망[서울제물포터널 민간투자사업(2공구)]

⇒ 차량과 사람이 동시에 이용하고 있음을 감안하여 차량스토퍼 필요여부 검토 및 이용 안전수칙 준수

❍ 도심지 NATM공법의 소음, 진동에 따른 천심도 구간 근접 건축물 사전
조사 철저[서울제물포터널 민간투자사업(2공구)]

⇒ 발파전 소음, 진동 영향범위의 면밀한 현장조사를 통해 예상민원 대비 철저

품질관리 분야

❍ 철근콘크리트 공사부분 피복두께 부족, 재료분리, 철근노출, 이어치기 불량
등 발생[망우3동 주택가 공동주차장 건설공사]

⇒ 콘크리트 타설 품질 불량부분 보수몰탈 등 보수 보강 요망

❍ 램프 B구간 보강그라우팅 시공시 품질관리 철저 요망[서울제물포터널 민간
투자사업(2공구)]

⇒ 보강 그라우팅시 양생기간 준수 등 철저한 품질관리 시행

□ 조치사항

❍ 지적사항은 점검 당일 시공업체 및 감리단(감독)에 전달하여 즉시
시정 요구

❍ 발주기관(부서)에 지적사항 시정 및 현장관리 철저토록 공문 통보

붙임 : 점검 주요 지적사례 1부.  끝.