문서번호	문화시설과-8051
결재일자	2018.10.8.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	문화시설총괄팀장	문화시설과장	문화시설추진단장		문화본부장
김권웅	박정추	안준모	代안준모		10/08 서정협
협 조
	문화관리팀장			이영미

세종문화회관 블랙박스극장 공사완료 보고

2018. 10.

문화시설추진단

(문화시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	■	□	세종문화회관 협의
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

세종문화회관 블랙박스극장 공사완료 보고

‘세종문화회관 블랙박스 극장 조성사업’ 공사가 완료(’17.5.15.~’18.8.31.)되어 추진결과 및 향후일정을 보고 드림

□ 추진근거

○ 세종문화회관 블랙박스극장 조성 계획(문화정책과-3684, ’16.2.2.)

○ 블랙박스극장 조성공사 변경계획(문화시설과-3684, ’18.5.4.)

○ 세종S씨어터 조성공사 완료 통보(세종문화회관 공간리노베이션TF팀-526, ’18.9.17.)

□ 그간 추진경위

○ ’12.11. : 예술동 증축공사 준공(실험극장 내부 및 설비 제외)

○ ’15. 8. : 블랙박스극장 조성 타당성 용역

○ ’15. 9. : 블랙박스극장 조성 市 투자심사

○ ’16. 1. : 블랙박스극장 조성 사업계획 수립

○ ’16. 2. : 민간대행사업 계약체결(서울시↔세종문화회관)

○ ’16. 6. : 설계현상공모 및 설계자 선정

○ ’16. 7. ~ ’17. 3. : 기본 및 실시설계

○ ’17. 4. ~ ’17. 5. : 건축심의·협의(종로구), 시공자 선정·계약

○ ’17. 5. 15. : 공사착공

○ ’17. 9. 4. : 1차 완성도제고방안(변경계획) 승인

○ ’18. 5. 4. : 사업 변경계획 수립(지하철 연결통로 설치계획 제외)

○ ’18. 8. 31. : 공사완료

□ 사업개요

○ 위    치 : 종로구 세종대로 175 세종문화회관(예술동 지하)

○ 기    간 : 2016. 1.~ 2018. 8.

○ 규    모 : 328석(가변형), 면적 2,228㎥(지하1~지하3층)

○ 내    용 : 블랙박스극장 조성(무대, 객석, 대기실, 로비 등)

○ 추진방법 : (재)세종문화회관 사업대행

○ 총사업비 : 7,574백만원(사업비 정산예정)

○ 공사참여자

- 시공자 : 신한건영(건축,토목,소방), 대우전기(전기), 금강전력(통신)

- 감리자 : 자연디자인건축사사무소 컨소시엄

- 설계자 : ㈜제이유건축사사무소 컨소시엄

□ 준공검사 결과

○ 검사일자 : 2018.9.12.(수)

○ 검 사 자 : 분야별 공사감리자 및 공사감독자(세종문화회관 공간리노베이션TF팀)

○ 검사결과 : 설계서 및 시방서 내용에 적합하게 완료됨

□ 시설물 인계‧인수 계획

○ 대상 : 세종문화회관 블랙박스극장(S씨어터) 건물 및 시설물 일체, 관련서류(준공도면, 하자보험증서, CD), 열쇠 등

○ 인계‧인수자

- 인계자 : 문화시설과, 세종문화회관 공간리노베이션TF팀(대행사업자)

- 인수자 : 문화정책과(재산관리관), 세종문화회관 시설운영팀(위탁관리관)

○ 기간 : 2018.10.4.~10.17.

○ 방법 : 대행계약서 제3항제1항 2호에 따라 (재)세종문회회관 내부 자체적 (공간리노베이션TF팀 → 시설운영팀)으로 시설물 인수인계 시행

※ 주요공정별 하자담보책임기간 (건설산업기본법 시행령 제30조)

‧ 철근콘크리트, 철골공사 기둥‧내력벽 : 10년

‧ 방수공사, 소방설비 : 3년

‧ 조적, 금속, 석, 설비공사 : 2년

‧ 전기‧통신공사, 목, 수장, 타일, 미장, 창호‧유리, 도장, 토목, 기타 : 1년

□ 사업 유공자 표창 계획

○ 표창개요
- 표창인원 : 3명(시민 1명, 직원 2명)

구분	훈격	대상자	소속	직위	담당부서
시민표창	서울특별시장	임대원	㈜신한건영	건축공사 현장소장	자치행정과
직원표창	서울특별시장	유현승	(재)세종문회화관	공간리노베이션TF팀장	인사과
직원표창	서울특별시장	박종선	(재)세종문회화관	과장	인사과

- 표창시기 : 2018년 10월

- 주요공적 : 세종문화회관 블랙박스 조성사업을 현장에서 성실하게 수행하고 성공적으로 사업을 완료하여 시정발전에 기여

□ 향후계획

○ 시험운영 및 잔손보기 :  ’18. 9.~10.

○ 사업완료 보고 및 사업비 정산 :  ’18. 10.

○ 사업유공자 결격사유 검토 및 표창 :  ’18. 10.

○ 개관기념 프로그램(페스티벌) 운영 :  ’18. 10. 18.~12. 30.

붙임 : 준공사진 1부.  끝.