문서번호	교통행정과-70610
결재일자	2018.10.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		교통시설팀장		교통행정과장		안전건설교통국장
연재훈		고옥래		황규영		전결 10/10 김재겸
협조
	재무과장		강형구
	계약팀장		양영종

★ ◉

- 2018년 교통안전표지 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제2회) 시행 보고

2018. 10.

	성 동 구
	(교통행정과)

- 2018년 교통안전표지 유지보수공사(단가계약) -

설계변경(제2회) 시행 보고

우리 구에서 『2018년 교통안전표지 유지보수공사(단가계약)』 시행중 공사물량 변경사항이 발생하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 보고하는 사항임

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명: 2018년 교통안전표지 유지보수공사(단가계약)

❍ 위    치: 성동구 관내

❍ 공사기간: 2018. 3. 12. ~ 2018. 12. 31.

❍ 공사규모

- 교통표지신설 133개소, 교통표지교체 103개소, 교통표지철거 156개소,    교통표지 36개소 등

❍ 도 급 비: 42,201,510원

❍ 계약상대자: ㈜아트인더스트리 대표 이국환

Ⅱ		예산 현황

(단위 : 원)

구분	구비	시비(재배정)	비고
교통안전표지 설치 및 유지보수		18,000,000	발주예산
어린이(노인)보호구역 개선사업	30,000,000		발주예산
`18년 어린이보호구역 정비사업		24,960,000	동호•숭신초
`18년 노인보호구역 정비사업		5,160,000	구립성삼경로당
교통규제 시설물 개선사업	10,000,000		방침서 참조
합계	40,000,000	48,120,000

Ⅲ		설계변경 내용

❍ 설계변경 사유

- 보호구역(어린이,노인) 신규 및 확대 지정에 따른 개선사업 본공사내역에 반영(방침서 참조)

- 교통규제시설물 설치에 따른 본공사 내역에 반영(방침서참조) 등

❍ 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분	금 액			비고
	당 초	변 경	증 · 감
총공사비	42,201,510	82,320,000	40,118,490
도 급 비	42,201,510	82,320,000	40,118,490
관 급 비	-	-	-

❍ 주요 변경내용

- 교통표지 신설: 133개소 → 292개소, 교통표지 교체: 103개소 → 132개소

- 교통표지 철거: 156개소 → 278개소, 교통표지 정비: 36개소 → 15개소

☞ 관련근거

1. 2018년 교통규제시설물 설치계획[교통행정과-65999호(2018.9.17.)]

2. 2018년 보호구역(어린이, 노인) 개선사업 시행계획[교통행정과-67655호(2018.9.21.)]

Ⅳ		조치 계획

❍ 상기와 같이 공사 물량 증•감 사항에 대하여 설계변경 후 공사시행 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임  1. 설계변경 내역서 1부.

2. 방침서 2부.

3. 제비율 검증 확인서 1부. 끝.