내 삶을 바꾸는 서울 10년 혁명
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 요청(동부간선도로 지하차도 설치 기본설계용역)

「동부간선도로(창동·상계구간) 지하차도 설치 기본설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용역개요

가. 용역명 : 동부간선도로(창동·상계구간) 지하차도 설치 기본설계용역

나. 용역기간 : 2018. 8.10.~ 2018.10.10.

다. 계약자 : ㈜신성엔지니어링  대표 정찬섭

라. 계약금액 : 금이천구백사십삼만원(￦29,430,000)

2. 변경내용

가. 준공기한

- 당 초 : 2018. 8.10.~ 2018.10.10.(2차 ‘18. 8.10.~’18.10.10.)

- 변 경 : 2018. 8.10.~ 2018.12.21.(2차 ‘18. 8.10.~’18.12.21.)

나. 계약금액 : 29,430,000원(변동없음)

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 준공기한 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 및 예정공정표(당초, 변경) 1부.  끝.

	동북권사업단장
주무관	박강수		기반조성팀장	장충근		동북권사업반장	10/10 곽석권
협조자
시행	동북권사업단-8953	(		)	접수		(		)
우	04520	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레스빌딩 5층	/
전화	02-2133-8288	/전송	02-2133-0740	/		/	부분공개(5)