문서번호	시설보수과-3395
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설보수과장
최문석	양지웅	10/11 박춘배
협 조

청량제2고가차도 보수공사 세부시행 계획

2018. 10.

성동도로사업소

(시설보수과)

청량제2고가차도(과선교) 보수공사 세부시행 계획

「교량 및 고가차도 일상유지보수공사」작업중 발생한 콘크리트 박락과 관련하여 보수공사를 조속히 시행하여 시민안전 및 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

1		관 련 근 거

□「청량제2고가차도(과선교)」보수공사 추진계획(시설보수과-1800, 2018,06,07)

□ 철도보호지구내 행위신고 협의 회신(한국철도시설공단 시설관리처-12692, 2018.07.12)

□ 예산 재배정 알림(시설비)[교량시설물 일상유지보수](교량안전과-17451, 2018.10.08.)

2		공 사 개 요

시 설 명	위 치	규 모	도 급 사	감 독 관	비 고
청량제2 고가차도	동대문구 전농동 602-3~ 전농동 103-285	1. 신축이음하부 강판보수(25m) 몰탈보수(30m) 2. 부대공 1식	㈜아이엠유건설 현장대리인 : 윤문수 HP : *************	감 독 : 양지웅 HP: ************* 보조감독 : 최문석 HP: *************	공기 25일 소요

철도운행안전관리자: 구홍모***************

전기안전관리자: 신창선***************

3		공 사 계 획

□ 공사기간: 2018.10.11.~11.30.중 25일 소요. (00:00시~04:00)

- 별도 협의된 전력차단계획서에 의거하여 작업을 진행하되 철도공단의 별도 지시가 있을 경우 작업일정 변경.

□ 시공방안

- 전차선과의 이격거리를 준수하기 위해 공중비계 사용이 불가하므로, 강관비계를 3단으로 쌓아 당일 설치·해체하여 사용

- 녹슴 방지를 위해 거푸집 및 낙하방지시설은 스테인리스(STS) 자재사용

- 낙하방지시설의 흔들림 방지를 위해 사각강관을 사용하고 볼트등으로 체결

- 단면복구시 충분한 치핑후 부착력 증진을 위하여 앙카 설치

- 기타 사항은 자체정밀점검 외부전문가 의견을 준용하여 공사 시행

□ 시공순서

(1) 작업준비 (2) 비계설치 (3) 장비 및 자재투입 (4) 콘크리트 치핑 및 기타보수 (5) 장비정리 및 청소 (6) 비계 철수 및 주변청소

□ 사업비 집행계획

- 개략공사비 : 약 70,000천원

· 신축이음 하부보수(STS거푸집, 무수축 몰탈 타설)

· 낙하방지시설 : STS판+사각 강관으로 교체

· 부대공 : 철도안전관리자, 전기안전관리자 선임, 강관비계 설치 등

4		행 정 사 항

□ 철도구간이므로 작업시간 등에 제약받는 점을 고려하여 시간제한 할증 등 타당한 할증을 부여하고, 추후 설계변경시 정산.

□ 야간공사 현장감독 시 초과근무시간 인정(4시간/일)

붙임 : 1. 보수공사 설계도(안) 1부.

2. 비상연락망 1부.

3. 시공계획서 1부.  끝.