투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	남부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	교통안전시설 원인자 부담공사 공사기간 연장 요청(동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사)

1. 남부도로사업소 기전과-655(2018.2.13.), 교통운영과-15294(2018.9.11.)호와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인『동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사』와 관련하여 교통안전시설(신호) 원인자 부담공사 기간을 아래와 같이 변경승인 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 동작대로 연장 중앙버스 전용차로 설치 전기공사

나. 공사위치 : 동작대로(방배서~과천대로 서울시경계)2.2km구간-9개소

다. 변경내용 : 공사기간 변경

- 당 초 : 2018.02.13. ~ 2018.08.31.

- 변 경 : 2018.02.13. ~ 2018.10.31.

- 사 유 : 개통 후 도로운영 보완·안정화.    끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김진수		건축설비과장	代이강욱		설비부장	10/11 권오식
협조자
시행	설비부-13855	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개