문서번호	기전과-8831
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		10/11 代김흥식
협조
	주무관		정경성

『교통안전시설 원인자부담공사(신원프라자 앞)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 10.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(신원프라자 앞)』

현장 실정보고에 대한 검토보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-36354(2017.12.19.)호

㈜트래픽스 TR-감-181002(2018.10.08.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 횡단보도 확충정비사업 신원프라자 앞

원 인 자 : 구로구청

공사장소 : 구로구 중앙로 13 일원

공사내용 : 교통신호기(차/보) 신설

공사기간 : 2016.06.19. ~ 2018.10.17.

공사관련업체

- 원인자 : 구로구청

- 감리사 : ㈜트래픽스

- 시공사 : ㈜에스엠플러스정보통신

Ⅲ		실정보고 내용

현장여건에 따른 물량 및 공사금액 변경

Ⅳ		변동사유 및 내용

변동사유 상세내용

- 도로관리심의(구로구청) 조정결과 도로횡단 굴착 불허(2017년 포장)

- 현장조사결과 당초 설계도서와 서로 상이한 부분 발생(지주 및 부착대)

- 전원선 지중굴착구간 변경 등

주요 변동 내용(물량)

구 분	변경 전	변경 후	비 고
지 주	300A	250A	2본
부착대	11m	9m	2본
지중선로	193m	129m	전원선, 통신선
맨홀	5	2

※ 상세 변동내역 붙임 참조

Ⅴ		진 행 경 과

날 짜	내 용	시행자	비 고
‘18. 05. 23.	승인요청	구로구청
‘18. 06. 09.	승인통보	기전과	조건부 승인
‘18. 10. 08.	실정보고	감리사

Ⅵ		검 토 결 과

현장 실정보고대로 설계변경을 승인

Ⅶ		행 정 사 항

감리사 현장 실정보고에 대한 승인 및 유관기관 통보

붙임 1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 설계도면 1부.

3. 도로관리심의 조정결과 통보 1부.  끝.