투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	「교통안전시설 원인자부담공사(신원프라자 앞)」감리사 실정보고에 대한 승인 통보

1. 귀 기관(사)의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 교통관리과-36354(2017.12.19) 및 트래픽스 TR-감-181002(2018.10.8)호와 관련입니다.

3. 위 호의 관련된 감리사 실정보고(설계변경)에 대하여 승인함을 통보합니다.

4. 공사개요 및 주요 변경내용

가. 공 사 명 : 횡단보도 확충정비사업 신원프라자 앞

나. 공사장소 : 구로구 중앙로길 13 일원

다. 공사내용 : 교통신호기(차/보) 신설

라. 공사관련 업체(기관)

- 원인자 : 구로구청

- 감리사 : *****

- 시공사 : ***********

마. 변경내용 : 현장여건에 따른 물량 및 공사금액 변경(상세내용: 붙임참조)

바. 변경사유

- 도로관리심의(구로구청) 조정결과 도로횡단 굴착 불허(2017년 포장)

- 현장조사결과 당초 설계도서와 상이한 부분 발생(지주 및 부착대)

- 전원선 지중굴착구간 변경 등

5. 행정사항

가. 원인자께서는 교통신호기 공사와 관련된 주요사항 발생 시 승인부서와 사전 협의하여         주시기 바랍니다.

나. 감리사께서는 변경된 물량의 기자재 검수 시 시험성적서와 반입자재규격 일치 여부를        반드시 확인 후 검수 및 시공하여 주시고 공사 기간 연장, 조건부 승인사항 관련 등의         중요사항 발생 즉시 사실 관계를 포함하여 실정보고하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 실정보고서 1부.

2. 설계변경내역서 및 현장도면 1부.

3. 도로관리심의 조정결과 통보 1부.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	구로구청장(교통행정과장),(주)트래픽스,서울특별시지방경찰청장(교통관리과장),서울구로경찰서장(교통과장),서울특별시장(교통운영과장)
주무관	이성도		기전과장	10/11 代김흥식
협조자	주무관	정경성
시행	기전과-8833	(		)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화	02-2657-7963	/전송	02-2657-7939	/	lsd2000@seoul.go.kr	/	부분공개(7)