문서번호	급수운영과-25009
결재일자	2018.10.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		동부수도사업소장
이훈재	권기섭	송근호		10/11 이구석
협 조

송배수관 정비공사 관급자재 조달구매 계획

(제수밸브 및 강직관 D=1,000mm)

2018. 10.

동부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

송배수관 정비공사 관급자재 조달구매 계획

「군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사」의 긴급히 사용할 관급자재 (제수밸브 및 강직관)에 대하여 수도자재관리센터 납품기한이 장기간 소요되어 직접 조달구매 하고자 보고 드림.

Ⅰ		개 요

□ 공사 현황

○ 관련근거: 천호대로 노후 송배수관 정비계획(배수과-3576호, 2018. 5. 2.)

○ 공 사 명: 군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사

○ 공사개요: 관 부설 D=700~1,000mm, L=42m

(기존관 폐쇄 D=900~1350mm, L=2,650m)

○ 사 업 비: 1,300백만원

○ 공사기간: 2018. 5.~2018. 12.(7개월)

□ 자재 수급 계획

○ 관급자재비: 172백만원

총사업비 (A=B+C)	총공사비 (B)	관급자재비 (C)	공사용자재비 (D)	관급자재비율 (E=C/B*100)	공사용자재비율 (F=D/B*100)
1,226,874천원	1,054,088천원	172,786천원	122,435천원	16.4%	11.6%

○ 관급자재 추가 사용계획

- 제수밸브(매설용 센터캡 금속시트 버터플라이밸브) D=1,000mm×1개

⇒ 제2구간(아차산역삼거리) 라인스토핑(상수도관 부단수 차단)공법에              필요한 제수밸브, 공간 협소에 따른 원형 변실 설치가 가능한 제품

- 강직관(폴리에틸렌피복강관, Φ1,000×t8.0mm) 7본(42.7m)             ⇒ 제1구간(군자교) D1500×1,000mm 연결공사 지하매설물 저촉으로 우회 배관

Ⅱ		구매계획

□ 추진배경

○「군자교~아차산배수지간 송배수관 정비공사」추가 사용할 제수밸브 및        강직관 D=1,000mm을 수도자재관리센터로 구매의뢰 시 납품 소요일수가        45일 이상 소요되어 공사 기간내 준공이 어려우므로 직접 구매 필요

- 수도자재관리센터(재고자재 없음, 예산배정→구매요구→자재납품·검수→출고): 최소 45일       - 사업소 직접구매(조달구매→자재납품·검수→출고): 15일 이내

□ 건    명: 제수밸브 및 직관(SP) D=1,000mm 구매

□ 소요예산: 32,859,690원(물품가격 28,351,720원+조달수수료 176,490원)

○ 매설용 센터캡 금속시트 버터플라이밸브(D=1,000mm×1개) 17,523,000원

○ 폴리에틸렌피복강관(Φ1000×t8.0mm, 42.7m) 15,160,200원

○ 동일 사양 제품의 최저가 구매(붙임「물품구매 산출기초조사서」참조)

○ 조달구매(제3자단가계약)에 따른 계약심사 제외대상

□ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 상수도관(송배수관) 정비)

□ 구매방법: 조달구매(제3자 단가계약)

□ 납품기한: 45일(납품요구일로부터)

□ 추진일정

○ 10. 11.: 구매계획 수립 및 물품 구매 시행(행정지원과 계약의뢰)

○ 10. 19.: 자재 납부 및 검수

○ 10. 26.: 밸브 및 관 부설 완료

Ⅲ		행정사항

□ 수동식 제수밸브 물품구매(조달구매) 요청

○ 물품 계약의뢰(5천만원이하): 사업소 행정지원과

붙임  관련자료(물품매입요구서, 산출기초조사서, 제품규격서 등) 각 1부.  끝.