투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(제14회 물가변동 계약금액 조정 검토결과 및 공원조성공사 관련 회의결과 조치사항 알림 )

1.업무지시현장 : 강남순환도시고속도로 건설(4공구) 롯데건설(주), 강남순환도시고속도로 건설(4공구) 주식회사 서영엔지니어링

2.작 성 일 자 : 2018-10-11 10:10:50

3.지 시 내 용

가. 롯건강남4 제2018-197호(2018.7.27.), 서영강남 제2018-209호(2018.9.28.) 와 관련, 제14회 물가상승비 설계반영요청한 사항에 대하여 책임감리원 검토결과와 같이 계약상대자(롯데건설)의 최초 청구안을 설계변경에 반영하여 정산하시기 바랍니다.

나. 서울시 도로관리과-14758호(2018.10.5.)와 관련, 남부도로사업소 청사이전부지 일대 공원조성공사 건으로 서울시 도로관리과로부터 현안사항에 대한 회의결과 조치사항을 통보받아 알려드리니 조치하시기 바랍니다.

1) 조치사항

- 도로옹벽 상단 안전휀스 설치, 강남순환로 횡단 박미지하도로에서 공원으로 진입하는 계단 설치

- 도로옹벽 구조물 안전진단 결과 책자 2부 제출

※ 본 문서는 건설사업관리단 및 시공사에 송달됩니다.

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

※ 본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

※ 업무지시전 내용 수정을 원하는 경우 One-PMIS로 반송 후 One-PMIS에서 재작성을 해

주시기 바랍니다.

주무관							남덕희			도시고속도로과장					10/11 명경출
협조자				주무관						박운용
시행			토목부-17355									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-8666						/전송			02-3708-2599					/	heedeok@seoul.go.kr												/	부분공개(5)