문서번호	조경과-5667
결재일자	2018.10.12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	주무관		조경과장		관리부장		서울대공원장
호명옥	강금완		강인호		심상원		10/12 송천헌
협 조

‘고객 편의시설 확충을 위한’

야외탁자 직영제작 계획

2018. 10.

조 경 과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

‘고객 편의시설 확충을 위한’

야외탁자 직영제작 계획

공원내 이용객이 많은 시설물 주변 공간에 부족한 휴게시설물을 직영 제작·설치하여 고객들에게 휴식공간 제공 및 이용만족도 향상에 기여하고자 함
		ㅊ
	ㅊ

□ 추진배경

○ 고객 편익시설 확충방안으로 목재 등 자재를 구매하여 직영 제작으로 예산절감

○ 동절기 야외작업이 어려운 조경관리 특성을 감안, 실내작업 발굴로 근로환경 개선

□ 추진개요

○ 설치위치 : 공원 전지역

※ 그간 제작실적 : 528조(2015년 128조, 2016년 200조, 2017년 200조)

※ 노후 야외탁자 철거 : 총 67조(파손 등)

○ 작업장소 : 구, 동물분환경처리장(목공 작업장)

○ 기    간 : 2018. 12. ~ 2019. 2.

○ 규    모 : 야외탁자(1500×1400, T30), 300조

○ 사례사진

유-스트림	테마가든(장미원)

□ 소요예산 : 67,582천원

○ 산출금액(300조) : 67,581,040원

- 하드우드 목재(조달구매) : 51,581,040원

· 목재 : 968㎡(3.227㎡×300조)×53,000원 ≒ 51,304,000원

· 조달수수료 : 51,304,000원×0.54% ≒ 277,040원

- STS 볼트, 너트 등 소모품 : 16,000,000원

※ 완제품 구매시 : 240백만원(※ 예산 절감액 172백만원)

- 산출액 : 800,000원×300조 = 240,000,000원

○ 예산과목 : 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 꽃동산조성및녹지조경시설물유지관리, 재료비

□ 추진일정

○ 2018. 10. 15. : 목재구입(관급자재)

○ 2018. 11. 30. : 소모품 구매 및 목재검수

○ 2018. 12. ~ 2019. 2. : 제작 및 배치

□ 기대효과

○ 부족한 편의시설 확충하여 관람고객 만족도 향상

○ 직영근로자 활용으로 동절기 작업능률 증대 및 실내 작업 확충

붙임  1. 사례사진 1부.

2. 야외탁자 도면 1부.  끝.